투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)디앤오종합건축사사무소 대표 정봉원
(경유)
제 목	설계용역 절차이행 관련 의견통보(서울광역푸드뱅크센터 이전·건립)

1. 디앤오 제2019-06-41호(‘19.6.25) 설계도서 납품 및 공사내역 제출관련입니다.

2.『서울광역푸드뱅크센터 이전·건립』설계용역 관련 납품도서를 검토한 바, 예정공사비가 예산을 초과하여 추가 예산확보 후 계약심사 등 절차진행이 가능하여 예산확보를 위해 사업의뢰부서와 협의중에 있으며,

3. 따라서, 추가 예산확보를 위해 소요되는 기간은 용역 지연배상금 지체일수 산정에서 제외할 예정임을 알려드립니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	오명희		복지시설과장	조영수		건축부장	07/12 임인구
협조자
시행	건축부-12057	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2653	/전송	3708-2659	/	saimi2003@seoul.go.kr	/	부분공개(5)