문서번호	정수과-1894
결재일자	2019.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김용식		정희중	07/12 서대훈
협 조
	주무관			김수영
	주무관			장호
	주무관			박동식

「2019년 정수처리시설 청소용역」하반기 추진계획

“상수도 사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수”

강북아리수정수센터

2019. 7.

정수과

「2019년 정수처리시설 청소용역」하반기 추진계획

우리 정수센터 2019년도 정수처리시설 청소 추진계획을 수립 시행하여 시설물 운영 및 유지관리에 철저를 기하고, 맑고 깨끗한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2019년 정수처리시설 청소용역

계약기간 : 2019. 3. 12. ~ 2019. 12. 26.

계약업체 : 동하엔지니어링(대표 김윤희)

계약금액 : 금251,121,590원

청소물량

□ 주벽청소 288,086㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 5,568㎥, 상등수 이송 60회

청소횟수

□ 연 1회 : 정수지

□ 연 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 배출수처리장

활성탄흡착지, 농축조 1,2차, 여과지,활탄지 건물내부

□ 연 4회 : 배슬러지지, 배출수지, 침전지 트라프

Ⅱ		상반기 청소실적 및 하반기 계획

구 분		단위	청 소 물 량			비 고
공 종	시설명		상반기 완료	하반기 계획	소 계
주벽	침 전 지	㎡	61,178	61,178	122,356
	침전지웨어	㎡	8,606	8,606	17,212
	침전지수로	㎡	2,185	2,185	4,370
	여 과 지	㎡	10,287	10,287	20,574
	응 집 지	㎡	28,375	28,375	56,750
	배출수지	㎡	7,072	7,072	14,144	하반기 2회 청소 계획
	배슬러지지	㎡	2,646	2,646	5,292	“
	회 수 조	㎡	1,494	1,494	2,988
	1차농축조	㎡	0	6,970	6,970
	2차농축조	㎡	0	2,542	2,542
	활성탄흡착지	㎡	8,838	8,838	17,676
	건물내부청소	㎡	0	19,736	19,736	하반기 신규 2회 청소
		㎡	0	15,248	15,248
	소계	㎡	130,681	175,177	305,858

구 분		단위	청 소 물 량			비 고
공 종	시설명		상반기 완료	하반기 계획	소 계
정수지	주벽	㎡	0	16,673	16,673
	바닥	㎡	0	15,080	15,080
	소계	㎡	-	31,753	31,753
슬러지 (침전)	유입수로	㎥	59	59	118
	응 집 지	㎥	671	671	1,342
	소계		730	730	1,460
슬러지 (농축)	배출수지	㎥	142	213	284	하반기 2회 청소
	배슬러지지	㎥	305	305	610	“
	1차농축조	㎥	0	1922	1,025	상반기 정산에서 제외
	2차농축조	㎥	0	508	220	“
	소계	㎥	305	2,948	2,139
상등수 이송	농축조(4지)	회	0	2	2	상반기 정산에서 제외
	침전지(24지)		1	1	2
	소계	회	1	3	4
특이사항	*농축조 청소(주벽,슬러지,상등수이송)은 상반기에 준공기간이 늦어 하반기에 정산에 포함됨

Ⅲ		하반기 추진계획

청소기간 : 2019. 7. 11. ~ 2019. 12. 26.

청소대상

□ 응집지(24지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거 등

□ 침전지(24지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 바닥 퇴적물 제거 등

□ 여과지(56지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로 청소

□ 활성탄(36지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로 청소

□ 농축조(4지)  1회 : 주벽, 바닥, 웨어 청소

□ 배출수 처리장 : 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지)

□ 건물내부  1회 : 여과지, 활성탄 흡착지 내부 및 외부 청소

청소일정 관련 검토사항

□ 응집․침전지 벽체 도장 및 트라프 보수공사

- 공사위치 : 4계열 5지(응집지)

- 공사시기 : 7월 11일  예정

- 고려사항 : 시설팀 협의하여 공사진행

청소 세부일정

□ 청소예정공정표

구분	공정별 (지수)	7월		8월	9월				10월				11월				12월
		3주	4주		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주
여과지	전계열(56지)
건물내부	여과지 1,2
	여과지 3,4
	활성탄지1
	활성탄지1
응집· 침전지	1계열(6지)
	2계열(6지)
	3계열(6지)
	4계열(6지)
배출수지	4지×2회
배슬러지지	2지
정수지	4지
회수조	2지
1차농축조	2지
2차농축조	2지

※ 청소시기는 사업소 일정 및 보수공사 등으로 지별 일정이 변경될 수 있음

Ⅲ		행정사항

공정별 청소시 부서간 협조체제 유지

□ 생산량 조절 및 수질관리 철저 : 정수과

□ 청소시 농축조 부하관리 및 방류수 수질관리 : 정수과(배출수 처리장)

□ 응집․침전지 시설물 점검 및 각종 기전설비 점검 : 정수시설과

□ 청소 관련 각종 동력기기 전원공급 및 항비우기 협조 : 정수시설과

□ 유수율 향상을 위해 퇴수 물량 및 청소용수 최소화 : 정수시설과, 용역업체

청소작업 전․중․후 시설물 관리 및 수질관리 철저

□ 관계자 사전협의 및 사후점검 확행

□ 정수시설물 청소일정은 정수시설과와 사전 협의하여 시설물 유지관리, 안전점검 및 고장시설 보수 등과 병행 실시

□ 청소용역업체 교육실시

- 안전점검 : 침전지 추락 예방 교육, 사다리 사용에 관한 교육,

전기안전사고 예방 교육

- 청소후 정리정돈 : 여과지 및 활성탄 흡착지 작업후 청소실시

- 위생 및 청결 : 개인 위생 철저 교육 실시

붙임 : 1. 작업내용서(2019년 하반기) 1부

2. 청소내역서(2019년 하반기 ) 1부. 끝.