문서번호	수상안전과-2455
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		백성훈	07/15 송영민
협조
	주무관		차재두

여의도 관공선 선착장

유압식 도교 공사 추진

2019. 7.

한강사업본부

(수상안전과)

여의도 관공선 선착장

유압식 도교 공사 추진

여의도 관공선 선착장의 도교 작동을 수동식에서 유압식으로 변경하여 풍수해 대비 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진대상

○ 여의도 관공선 사무실 선착장 도교 리프트

선착장 도교	수동형 체인 도교

□ 추진사유

○ 현재 관공선 사무실 선착장은 팔당댐 방류량 5,000㎥/sec이상

일 때 도교를 사람(4명)이 직접 체인을 감아 올리는 방식으로 수방

대비를 하고 있으나, 시간과 인력이 많이 들어 어려움이 있음

○ 긴급 상황시 신속한 대응이 어려워 수방 대비의 효율성이 떨어짐

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진방법

○ Hydraulic system 설치

- Hydraulic cylinder 2 sets 설치

- Hydraulic tanks 2 sets 설치

- Hydraulic horse 1 set 설치

○ 유압장치 상, 하부 철 구조물 설치

- 유압장치 상, 하부 연결장치 설치

- 본선 데크 확장공사

○ 기존 수동형 체인 장치 사용

- 유압 시스템 사용 후 추가 고정으로 사용

- 유압장치 고장시 비상시 사용

□ 추진일정

○ 산출내역 작성 및 계약체결 의뢰 : ’19. 7.15. ~ 7.21.

○ 유압식 도교 수리               : ’19. 7.22. ~ 7.31.

□ 추진방법 : 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

□ 행정사항

○ 한강사업본부 총무과 : 수의계약 체결 의뢰

Ⅲ		소 요 비 용

□ 예산과목 : 한강공원 등 운영 및 관리, 시설비(100-401-01)

□ 예 산 액 : 금19,900천원(부가세 별도)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
계	19,900천원
유압 시스템	13,000천원	○ Hydraulic cylinder 7,000천원 ○ Hydraulic tanks 4,000천원 ○ Hydraulic horse 2,000천원
유압장치 상,하부 철구조물	6,900천원	○ 유압장치 상,하부 연결장치 1,500천원 ○ 본선 데크 확장 공사 3,000천원 ○ 장비대, 소모품 외 2,400천원

붙임 견적서 2부.  끝.