문서번호	에너지시민협력과-7671
결재일자	2019.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	에너지시민협력과장
김승준	代권영규	07/15 김연지

서울시민 가상발전소 사업설명회 개최 계획

ᅟᅡᆯ전

2019. 7.

기후환경본부

(에너지시민협력과)

서울시민 가상발전소 사업설명회 개최 계획

시민이 참여하는 전력수요관리 사업인 서울시민 가상발전소 100MW 조성을 위한 자치구 사업담당자를 대상으로 설명회를 개최하고자 함

1		행사개요

○ 일    시 : `19. 7. 25.(목) 16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 서소문청사 후생동 난국실

○ 참석인원 : 자치구 사업담당자, 서울에너지공사, 수요관리사협회

○ 진행순서

시 간	제 목	담당	비고
16:00~16:05	참석자 확인
16:05~16:10	인사말	에너지시민협력과장
16:10~16:50	시민참여형 수요반응자원사업 소개	서울에너지공사
16:50~17:10	서울시민 가상발전소 세부 운영 계획	김승준 주무관
17:10~17:30	질의 응답 및 건의사항	전체

2		주요내용

○ 전력 수요자원 거래시장 개요 및 운영구조

- 수요자원의 피크감축 운용 절차(급전지시→피크감소→정산금 지급)

- 수요자원 거래시장의 정산금 구조 및 산정방법

○ 수요반응자원 참여 대상 선정 및 등록방법

- 고압 계약전력 1,000kW 이상, 연면적 3,000m2 이상 우선 선정

- 규칙적인 전력소비를 하는 시설의 전기소비패턴(RRMSE) 검증

- 5분 단위 계량기 설치 및 모의 등록시험 계획

○ 자원별 전력피크 감소 방법 안내

- 건물의 냉난방기기 및 공조기 교차 운영, 기타 전자기기 1시간 운휴

○ 서울시민 가상발전소 100MW 조성 계획

- `19년 자치구 건물 수요 조사 및 하반기 등록 일정

- `20년 주상복합 및 대형 아파트 단지 참여 방법

3		행정사항

○ 자치구 환경과 사업담당자 설명회 참석

- 설명회 참석자 명단 제출 : `19. 7. 19.(금) 까지

○ 소요예산 : 금100,000원

- 다과비 : 100,000원(2,500원 × 40명)

- 예산과목 : 시민과 함께하는 에너지 절약, 에너지 시민협력사업 활성화,

원전하나줄이기 시민협력 지원, 사무관리비(201-01)

4		향후일정

○ 수요관리 가능자원 발굴 및 명단제출 : `19. 8월 ~ 9월

○ 신규자원 현장 방문 및 컨설팅 : `19. 9월

○ 신규자원 유효성 검증 : `19. 9월 ~ 10월

○ 신규자원 계량기 설치 : `19. 10월초

○ 신규자원 모의 등록시험 : `19. 10월말

○ 전력수요자원 등록시험 : `19. 11월

○ 전력수요자원 사업 추진 및 관리 : `19. 12월부터. 끝.