문서번호	공원녹지정책과-13334
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
이지영		김상주	07/15 하재호
협조

서울역 지하보도 캐노피 시범녹화 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
방문협의	조경과 중구(공원녹지과)	서울역 지하보도 캐노피 시범녹화	조경과(예산재배정) 및 중구(공원녹지과) 시행 및 유지관리	85백만원

2019. 7.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

서울역 지하보도 캐노피 시범녹화 추진계획

********에서 바라보는 외부경관 중 주변 경관을 저해하는 서울역 캐노피를 구조안전진단 결과에 따라 시범으로 녹화하여 서울로의 자연환경을 외부로 확장·연결하고자 함

1		추 진 방 향

□ 서울로 7017 주변 경관향상(경관연출)을 위한 녹화추진

□ 캐노피 시설물의 녹화추진에 따른 구조적 안전성 확보 방안을 위하여 구조안전진단 실시

□ 구조물 하중 결과에 따라 캐노피 녹화

2		대상지 현황

□ 서울역 지하보도 캐노피

○ 위    치 : 서울특별시 중구 봉래동 2가 63-7번지

○ 관리부서 : 중구청 도로시설과

○ 대상면적 : 220㎡

서울역우체국 앞 지하보도	지하보도 출입구 상부 정면

○ 추진경위

- ‘18.11.12. : 중구 도로시설과에서 ’18.4. 市 도로시설과에 공사비(10억) 요청하였으나, 별도 예산편성이 없었음

- ‘18.12.15. : 구조물 상부 녹화시설 하중 증가에 따른 시설물의 구조적 안전성 확보 방안 등에 대하여 중구 도로시설과와 협의후 공사 시행

※ 해당 지하보도는 1967.6.17. 사용개시 후 50년 경과된 시설물(B급)

- ‘19. 3. 25. : 중구 도로시설과 협의(안전진단 및 현장조사 협조요청)

관련공문 : 공원녹지정책과-5215호(2019.3.20.)

3		구조안전진단 용역결과

□ 용역개요

○ 건    명 : 서울역 지하보도 캐노피 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ 진단업체 : ㈜한국재해예방기술원 대표 윤하용

○ 추진기간 : ‘19. 3. 7.~ 4. 19.

○ 추진내용 : 구조안전진단, 옥상녹화 유형제시, 구조도면 작성

□ 진단결과

○ 녹화유형(안) : 경량형(76.30㎡) 및 캐노피 녹화(143.7㎡)

○ 제안하중

- 경 량 형    : DL +1.2kN/㎡  LL  1.0kN/㎡

- 캐노피 녹화 : DL +1.0kN/㎡  LL  0.5kN/㎡

○ 기타 보수공사 필요 : 누름콘크리트 박락 보수, 방수 공사 등

옥상(지붕)녹화(경량형)	옥상(지붕)녹화(경량형)

4		소 요 예 산

○ 소요예산 : *****

○ 산출내역

- 방수, 방근 및 기타 부대공사 : *****

- 서울역 캐노피 녹화          : *****

5		행 정 사 항

○ 관련부서 협력내용

담당부서		주요내용	추진일정	비고
공원녹지정책과		서울역 지하보도 시범녹화 추진계획 수립	‘19. 7.
조 경 과		예산재배정(서울시→중구)	‘19. 7.~8.
중구	공원녹지과	서울역 지하보도 시범녹화 시행 및 유지관리, 시설점검	‘19. 8.~10.
	도로시설과		매년 점검

붙임 요약보고서 1부.  끝.