문서번호	치수과-9657
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김재혁		백원기		민병기		07/15 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「성수동2가 275-14 주변 하수관로 이설공사」

설계변경(정산) 검토보고

2019. 7.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「성수동2가 275-14 주변 하수관로 이설공사」

설계변경(정산) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『성수동2가 275-14 주변 하수관로 이설공사』 의 시공 물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 성수동2가 275-14 주변 하수관로 이설공사

○ 사업기간: 2019. 4. 9. ~ 2019. 7. 26.

○ 공사개요: 하수관로 개량 D700mm ~ □1.0×1.0m → □1.2×1.0m, L=48m

하수관로 신설 □1.0×1.0m, L=38m

○ 도 급 자: 복리건설(주) (대표 장석영)

○ 도 급 비: 203,056,690원(시비)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 현장여건에 따른 주요공사물량 증감

- 하수관로 개량 □1.2×1.0m, L=48m → L=42m

- 하수관로 신설 □1.0×1.0m, L=38m → L=36m

- 도로 경계측구 설치 0m → 68m

- 도로경계석 설치 0m → 58m

- 아스팔트 표층 2.4a → 6.8a

○ 물량 증․감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
토 공	터파기	㎥	424	388		-36
	되메우기 및 다짐	㎥	230	162		-68
	아스팔트 포장 절단	m	257	424		167
	아스팔트 깨기	㎥	33	37		4
	콘크리트 깨기	㎥	2	25		23
배수공	경계측구 설치	m	0	68		68
	하수관 신설 및 개량	m	86	78		-8
포장공	아스콘 포장	a	2.4	6.8		4.4
부대공	차선도색	m	0	23		23
	물돌리기	hr	40	40		0

Ⅲ		설계변경 내역

○ 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	274,675,430	332,000,000	증 57,324,570
도 급 비	203,056,690	267,810,000	증 64,753,310
관 급 비	47,398,740	30,999,050	감 16,399,690
이 전 비	24,220,000	33,190,950	증 8,9709500

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙  임: 변경설계서 1부.