투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『2019년 차집관로 준설공사』 설계변경(제1차) 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설보수과-3947(2019. 7.15.)호에 따라 우리 센터에서 시행 중인 『2019년 차집관로 준설공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 제1차 설계변경 및 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』

나. 도 급 자 : 금희건설주식회사 대표 최 지 희

다. 공사기간 : 2019 2. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		573,892,720	629,880,900	증) 55,988,180
도급비	공급가액	521,720,655	572,619,000	증) 50,898,345
	부가가치세	52,172,065	57,261,900	증) 5,089,835
	계	573,892,720	629,880,900	증) 55,988,180

마. 설계변경 사유 : 준설공사 작업구 신설 등에 따른 시공물량 증ㆍ감 발생

바. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

따로붙임 :  1. 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부 끝.

	시설보수과장
주무관	김원선		주무관	조연상		시설보수과장	07/15 임준빈
협조자
시행	시설보수과-3949	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	부분공개(7)