문서번호	설비부-10823
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김은덕	07/16 임정규

「돈화문민요박물관건립 기계공사」

설계변경 및 준공(정산)보고

2019. 07

도시기반시설본부

(설 비 부)

「돈화문민요박물관건립 기계공사」

설계변경 및 준공(정산)보고

「돈화문민요박물관건립 기계공사」책임건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 및 준공(정산)에 대하여 검토 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 돈화문민요박물관건립 기계공사

□ 위    치 : 서울시 종로구 와룡동 5-9 외 1

□ 공사규모 : 지2층/지상1층(연면적 1,384.82㎡), 문화 및 집회시설(전시장)

□ 공사기간 : ‘2018.01.10.~2019.8.31.(1차 2019.7.31.)

□ 공사비 :508백만원(1차 187)

□ 도급사 : ㈜화련산업 외 2개사

□ 감리사 : ㈜혜원까치종합건축사사무소(건축,기계,소방)

2		관련근거

□ 설계변경 및 준공정산 보고(혜원돈화 제2019-242, 2019.07.15.)

3		검토내용

□ 준공(정산)내용

□ 설계변경 및 준공(정산) 금액

구분	계약금액	준공(정산)금액	증감	비고
총차	508,373,760	502,737,000	감 5,636,760
1차	187,251,000	182,500,000	감 4,751,000	금회정산

□ 설계변경 내역 현황(총차)

구 분	계약금액	설계변경	정산금액	변경계약금액	증감
재료비	184,791,239	186,020,045		186,020,045	1,228,806
노무비	152,717,622	149,508,998		149,508,998	-3,208,624
경비 (보험료,안전관리비포함)	49,446,524	48,893,351		48,893,351	-553,173
일반관리비	21,282,544	21,141,237		21,141,237	-141,307
이윤	33,491,853	32,891,824		32,891,824	-600,029
공급가액	441,729,782	438,455,455		438,455,455	-3,274,327
부가가치세	44,172,978	43,845,545		43,845,545	-327,433
도급액	485,902,760	482,301,000		482,301,000	-3,601,760
물가변동	22,471,000	22,471,000	2,035,000	20,436,000	-2,035,000
합계	508,373,760	504,772,000	2,035,000	502,737,000	-5,636,760

□ 설계변경 및 준공(정산)내역 현황(1차)

구 분	계약금액	설계변졍	정산금액	변경계약금액	증감
재료비	52,942,492	53,019,015		53,019,015	76,523
노무비	73,436,087	73,378,920		73,378,920	-76,167
기계경비	13,339	9,404		9,404	-3,935
산재보험료	2,864,006	2,861,776		2,861,776	-2,230
고용보험료	638,893	638,395		638,395	-498
건강보험료	1,151,763	1,150,860	674,120	476,740	- 675,023
연금보험료	1,686,994	1,685,672	1,487,672	198,000	- 1,488,994
노인장기요양보험료	105,734	105,674	65,144	40,530	-65,204
산업안전보건관리비	3,536,313	3,536,999	0	3,536,999	686
환경보전비	362,120	362,178	362,178	0	-362,178
하도급지급보증발급수수료	97,772	97,788	97,788	0	-97,788
기타경비	7,329,957	7,331,080	0	7,331,080	1,123
퇴직공제부금비	1,558,269	1,557,048	513,600	1,043,448	-514,821
일반관리비	8,014,803	8,015,411	176,029	7,839,382	-175,421
이윤	11,281,458	11,269,780	525,287	10,744,493	-536,965
공급가액	165,020,000	165,020,000	3,901,818	161,118,182	-3,901,818
부가가치세	16,502,000	16,502,000	390,181	16,111,818	-390,182
도급액	181,522,000	181,522,000	4,292,000	177,230,000	-4,292,000
물가변동	5,729,000	5,729,000	459,000	5,270,000	-459,000
합계	187,251,000	186,792,000	4,751,000	182,500,000	-4,751,000

□ 설계변경 내용

□ 설계변경 사유

- 전시동과 아카이브동의 방호구역을 통합에서 개별구역으로 변경 필요

- 지상1층 한옥부분 살수 성능개선 및 살수장애 최소화를 위해 스프링클러헤드 규격 변경(상향식 → 하향식).

□ 설계변경 물량 내역(총차)

(단위 :천원)

공종별	품 명	규 격	단위	수 량		금 액
				변경전	변경후	변경전	변경후	증□감
소화배관공사	강관배관	Ø15~Ø80	m	715	665	11,558	10,885	-673
	관보온	Ø25~Ø80	m	672	488	6,845	4,915	-1,930
	피팅류 (엘보,TEE 등)	Ø15~Ø40	EA	892	896	4,160	4,815	655
	밸브류 (밸브보온포함)	Ø15~Ø80	EA	8	20	935	2,146	1,211
	스프링클러헤드 상	폐쇄형 72℃	EA	73	26	1,259	448	-811
	스프링클러헤드 후레쉬	드라이펜던트 72℃	EA	0	50	0	1,737	1,737
	기타 (행거,U볼트,슬리브 등)	1	식			7,520	5,632	-1,888

□ 설계변경 물량 내역(1차)

(단위 :천원)

공종별	품 명	규 격	단위	수 량		금 액
				변경전	변경후	변경전	변경후	증□감
소화배관공사	강관배관	Ø25~Ø150	m	598	701	11,114	13,424	2,309
	피팅류 (엘보,TEE 등)	Ø25~Ø50	EA	568	329	635	578	-78
	시험밸브함설치(외함 STS)	500×1200×180	개소	3	2	350	233	-116
	알람밸브	Ø80	EA	1	0	339	0	-339
	기타 (행거,U볼트,슬리브 등)	1	식			8,140	6,364	-1,775

□ 건설사업관리단 검토의견

-『돈화문민요박물관건립 기계공사(총차 및 1차)』의 설계변경 및 준공(정산)에 대해 적정성을 검토한 결과, 적정하게 조치한 것으로  검토되어 보고함.

4		조치의견

□ 책임건설사업기술자로부터 제출된 설계변경 사항이 타당하므로 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 내역서(총차 및 1차) 1부.

4. 검증확인서(총차 및 1차) 1부.  끝.