문서번호	문화비축기지관리사무소-1560
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영관리팀장	★문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
장천섭	윤석현	서정화	07/16 남길순
협 조
	시민문화기획팀장		이지선

문화비축기지 “에코쉘터” 추진계획

2019. 7.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 “에코쉘터” 추진계획(안)

5기의 석유탱크를 재생하여 생태문화공원으로 조성한 문화비축기지 내 탱크와 문화마당 연계 공간에 건축가의 다양한 아이디어 실현을 통한 환경․생태문화․지속가능한 공간을 조성하고자 함

Ⅰ		추진배경(과정)

□ 추진근거

○ (가칭)서울문화비축기지 운영계획(시장방침 제367호, ’16.12.2.)

- 우리시 및 협치위원회를 통한 자립기반 마련 등

○ 협치위원회 “공간소위원회” 제안 (’18. 12.)

- 문화마당 내 전시물 설치 시 시민편의 공간 필요

○ 서부공원녹지사업소장 주재 현안회의 시(’19.6.11.)

- 지속가능한 공간관리 필요

․ 문화마당 등에 공원 이용시민을 위한 그늘막 설치 필요

․ 푸드마켓 운영 등을 위한 수도시설 설치 및 설거지시스템 오수 처리

○ 협치위원회 ‘지속가능 공간 워킹그룹’ 2차 회의(’19.6.24.)

- 젊은 건축가 등 다양한 아이디어공모를 통한 설계 및 시공

II		추진계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 문화비축기지 내 ‘에코쉘터’ 조성

○ 사업기간 : 2019. 7. ~ 2020. 2.

○ 사업예산 : *********(설계용역 및 공사비 포함)

○ 예산과목 : 문화비축기지 유지관리, 시설비

○ 추진방법

- 설계공모 : 2단계 설계공모(당선작 설계자와 수의계약)

- 공사시행 : 일반공개경쟁입찰

- 공사감리 : 당선작 설계자와 수의계약

○ 추진체계

- 문화비축기지(총괄)

- 지속가능공간 워킹그룹(참여) : *********************

추 진 체 계

문화비축기지		협 치 위 원 회 (지속가능공간워킹그룹)		문화비축기지
추진안 설명		추진방향 및 방법 논의․결정		공모, 입찰 수행

○ 공간기능

- 연중 문화행사 추진을 감안하여 행사에 지장을 초래하지 않도록 조성

․쉼터 기능, 야외 프로그램 교육 운영, 시민편의 증진 등

- 문화비축기지 운영 철학(재생, 친환경, 생태), 공원 기능 등을 종합적으로 감안 디자인하며, 건축재료 및 소품 등도 선택

Ⅲ		공모 및 위원회 구성

□ 아이디어 공모 및 설계용역

○ 공모명칭 : “문화비축기지 지속가능공간 디자인 프로젝트(SuSpace Design Project) 에코쉘터 설치 설계아이디어 공모”

○ 공모방식 : 아이디어 2단계 제안공모(1개작 응모 시 재공모)

○ 공모조건 : 아이디어 선정작에 한해 설계용역(수의계약)

○ 참가자격 : 국내 건축사

- 3명까지 공동이행 가능, 대표자는 국내 건축사

○ 공모기간 : 8주(56일) 정도(1단계 3주 / 2단계 5주)

※ 심사기간 : 별도

○ 공모내용

- 지속가능한 공간 활용을 위해 기지 내  문화마당 경계부에 쉼터 조성

- 문화마당의 지속적 활용방안과 함께 300㎡이내 쉘터공간 제안(예산범위 내)

- 주요기능：방문객을 위한 그늘막과 쉼터 제공, 야외 교육장으로 이용 가능

(전기사용 등 가능, 상하수도 사용은 일부지역에서만 가능하므로 기지와 협의 필요)

- 공모범위 : 첨부 도면 참고(설계범위 지도 표기)

○ 시상내용

구 분	수 량	상 금
당선작	1	설계 및 감리권 부여*************
우수작	1	*******
장 려	1	*******

※ 1차 응모작은 3개 작품을 선정하고,

2차 선정 작품 중 최종 프리젠테이션으로 심사하여 시상 결정

○ 제출서류

► 1단계 제출서류(아이디어공모신청서는 e-mail로 제출가능)

․공모참가 신청서, 기타 서류

․설계설명서(A3, 4매, 표지포함)

․문화마당 활용방안 및 배치도, 설계스케치, 설계이미지(렌더하지 않은 3D이미지)

► 2단계 제출물

․제안서(PPT, 10면) : 설계의도 및 설계방향, 설계공간의 의미

․설계설명서(A3, 6매, 표지 포함) : 개념, 설계도, 공간이미지 등

․컨셉 스터디 모형

□ ‘아이디어 공모 심사위원회’ 구성 운영계획

○ 구    성 : 총 5명 이내

- 협치위, 건축, 조경, 문화예술 등 4개 분야 구성(3배수)

- 아이디어공모 제출자가 분야별 추첨을 통해 빈도수 순으로 선정

○ 역    할 : 공모취지 및 실현 가능성 등을 심사하여 작품 선정

※ 심사계획은 별도 수립 추진

□ 설치공사 시행

○ 공사기간 : 착공일로부터 50일

○ 공 사 비 : ****************************

○ 시행방법 : 경쟁입찰에의한계약(일반입찰)

○ 입찰 참가자격

- 건설산업기본법 제8조에 의한 건축공사업 면허를 소지한 업체로 입찰공고일 현재 주된 영업소 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ		소요예산

○ 총액   --------------   *********(2018년 명시이월 예산)

- 공사비 ------------ 약 **************************

- 설계 및 공사감리용역비 ***************************************

- ***** ---------------     ********************************

○ 예산과목 : 문화비축기지 유지관리, 시설비

Ⅴ		추진 일정

○ 공모공고 일	7.24.

○ 참가신청서 제출	7.24. ~ 7.31.

○ 1단계

- 공모작 제출	8. 1. ~ 8.21.

- 작품 선정	8.28.

○ 2단계

- 공모작 제출	9. 1. ~ 10. 7.

- 작품 선정	10.14.

○ 실시설계	10~11월

○ 시공업체 선정	12월중

○ 공사 완료	2020. 2월중

따로붙임 : 에코쉘터 설치위치도 1부.  끝.