문서번호	건축부-12300
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
박진국		신추교	07/16 임인구
협조	어르신정책팀장		민선희
	주무관		조문석

『시립중랑 노인전문요양원 증축공사』

계약변경(기간연장) 검토보고

2019. 7.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립중랑 노인전문요양원 증축공사』

계약변경(기간연장) 검토보고

「시립중랑 노인전문요양원 증축공사」와 관련하여 주관부서(어르신복지과) 요구사항 반영에 따른 건설사업관리자로부터 공사기간 연장 요청이 있어 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명 : 시립 중랑 노인 전문 요양원 증축공사

□ 위    치 : 중랑구 양원역로 38

□ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,280㎡

□ 주 용 도 : 노유자시설

□ 시 공 사 : 용성종합건설(주)

□ 건설사업관리자 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소

□ 공사금액 : ***********

□ 공사기간 : **********************

Ⅱ		추진경위

□ 2016.04.07. : 시립중랑노인전문요양원 증축계획방침 수립

□ 2017.02.22. : 설계용역 계약 및 착수

□ 2017.12.20. ~'18.12.19. : 1차 공사 시행

□ 2018.12.20. : 2차수 공사 착공

□ 2019.01.30. : 창호 및 유리공사

□ 2019.05.19. : 예비준공검사 완료

□ 2019.06.17. : 예비준공검사 관련 업무 협의(도기본→어르신복지과)

□ 2019.06.21. : 예비준공검사 관련 업무 협의 회신(어르신복지과→도기본)    ※ 주관부서 요구사항 반영 요청 : 별첨 내용 참조

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

- 지방자치단체 공사계약 일반조건 제8절 2. 계약기간의 연장

- 공사기간(총차-2차)변경 요청건(PC19-0735, 2019.7.15.)

□ 변경내용(공사기간)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
2차	*******************	*******************	*****

*******************************************

********************************************

**********************************

**************************************

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		처리의견

□ ****************************************************************

Ⅴ		향후계획

****************************

***************************

붙 임 : 1) 공사기간 연장 요청 및 예정공정표, 합의각서 1부.

2) 주관부서 업무 협의 회신 1부. 끝.