문서번호	기전과-4231
결재일자	2019.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		임태수	07/17 김영삼
협조
	주무관		김해중

『양재지하차도 조명 개선공사』  관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2019. 7.

남부도로사업소

(기  전  과)

『양재지하차도 조명 개선공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

양재지하차도 조명 개선공사에 필요한 관급자재에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

1		공 사 현 황

○ 공  사  명 : 양재지하차도 조명 개선공사

○ 계약상대자 : 주식회사 ****** (대표자 : ***)

○ 계 약 금 액 : 금***********원

○ 계 약 일 자 : 2019.  6. 25.

○ 준 공 일 자 : 2019. 10. 28.

○ 공 사 개 요

- LED터널등 286등(75W 82등, 150W 204등) 교체

- LED가로등 18개소(U구간 – LED가로등 18등, 가로등주 18본) 교체

- 조명배전반 1면 교체외 전기공사 1식

2		추 진 현 황

○ 2019. 2. 13.	방침 수립 및 기술용역 타당성 심사 요청

○ 2019. 2. 25.	실시설계 용역 계약 의뢰

○ 2019. 5. 14.	실시설계 용역 준공

○ 2019. 5. 16.	계약심사 의뢰

○ 2019. 6. 11.	공사 계약 의뢰

○ 2019. 6. 17.	LED터널등 구매(2단계) 계약 의뢰

○ 2019. 6. 26.	관급자재(가로등, 배전반 등) 구매 계약 의뢰

○ 2019. 7.  1.	공사 착공

3		납품기한 연기 검토

○ 관급자재 구매 내역

품 명	규 격	단위	수량	구매 금액	비 고
LED터널등	75W	등	82	**********
LED터널등	150W	등	204	**********
LED가로등	75W	등	18	*********
철제가로등주	8m	본	18	**********
조명제어장치	터널등제어기	대	1	*********
배전반	폐쇄형배전반	면	1	**********
합 계				***********

○ 납품기한 연기 대상

- LED터널등 75W 82등, 150W 204등

○ 납품기한 연기 기간

품 명	규 격	당초 납품기한	변경 납품기한
LED터널등	75W	2019. 7. 28.	2019. 8. 31.
LED터널등	150W	2019. 7. 28.	2019. 8. 31.

○ 납품기간 연기 사유

- 자재 납품 후 설치까지 보관 장소가 협소하여, 주변 미관 및 안전사고 우려가 있고,

- 공사의 원활한 추진을 위해 공사업체와 납품업체 협의하여 납품일정 관리가 필요함

○ 연기사유 귀책소재 : 남부도로사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		향 후 계 획

○ 2019.  8. 31.	관급자재 납품

○ 2019. 10. 28.	공사준공.    끝.