＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	계약 변경 의뢰(수유6배수지 조명설비 조달구매)

1. 기전설비과-7032(2019.7.17.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인『수유6배수지 건설공사 전기공사』관련 원활한 사업 추진을 위하여 아래와 같이 계약 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 수유6배수지 조명설비 조달구매

나. 계약내역

계약업체	계약번호	계약금액(원)
*******	***********	*********
*******	***********	*********

다. 변경내역

- 납품기한 : [당 초] 2019. 7. 26. → [변 경] 2019. 11. 30.

- 계약금액 : 변동없음

라. 변경사유 : 선행공정에 따른 납품기한 조정

붙임 1. 납품기한 변경 방침서 1부.

2. 납품기한 변경 합의서 1부.  끝.

주무관	임은비		기전설비과장	07/17 조성태
협조자
시행	기전설비과-7034	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 서울시 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1337	/전송	02)3146-1319	/		/	부분공개(5)