투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(기타화초) 납품기한 연기요청(이촌한강공원 녹지 정비사업)

쾌적한 공원이용환경을 제공하기 위하여 추진중인『이촌한강공원 녹지 정비사업』에 소요되는 관급자재(기타화초)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 관급자재(기타화초) 구매(다수공급자계약)-이촌한강공원 녹지 정비사업

2. 관급자재 연기요청 내역

납 품 요구번호	품 명	규 격	수 량	납품기한		비 고
				당 초	변 경
12-19-1- 56448-00	기타화초	구철초, 식물매트, 340×500×40mm	969장	2019.07.20	2019.08.31	에코플랜트
		물억새, 식물매트, 340×500×40mm	6,820장
		부처꽃, 식물매트, 340×500×40mm	11,023장
		원추리, 식물매트, 340×500×40mm	787장
		은사초, 식물매트, 340×500×40mm	242장

3. 연기사유 : 사용시기 미도래

붙임 : 분할납품요구 및 통지서 1부.  끝.

	생태환경과장
주무관	장창수		생태환경과장	07/17 최병언
협조자
시행	생태환경과-1658	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개