문서번호	토목부-12868
결재일자	2019.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	박일연	07/17 김용제

공사용 가림막 및 보행자 임시통로 설치 검토보고

(남부순환로<개봉1동사거리 주변> 평탄화공사)

2019. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사용 가림막 및 보행자 임시 통로 설치 검토보고

(남부순환로<개봉1동사거리 주변>평탄화)

개봉푸르지오아파트앞 보도포장 부분내 공사 시행시 보행자 보호 및 소음 저감을 위한 공사용 가림막 및 보행자 임시통로 설치에 대하여 검토보고 드림.

사업개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사

○ 위    치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류 IC간

○ 규    모 : 폭 30m(6차로), 연장 L=1.1km

○ 총사업비 : 31,000백만원

- 공사비 26,798백만원, 감리비 2,152백만원, 보상비 1,000백만원, 설계비 1,050백만원

○ 시공사 / 감리사 : (주)삼일기업공사  / (주)동일기술공사

현  황

○ 개봉푸르지오아파트와 남부순환로 본선 사이 보도포장 부분에 기존 하수박스 철거 및 확대 이후 본선 방음벽 재설치 등 보도상 공사 구간에 가림막 설치 요청(민원 : 개봉 푸르지오아파트)

	보행자통로 공사용가림막 H=3m 신설Box 2.5*2.0 기존Box 2.0*2.5m

추진경위

○ ‘19. 3.15 : 남부순환로평탄화공사 관련 협조요청 (토목부-4330호)

○ ‘19. 3.22 : 아파트 공사용 가림막 설치 건 회신 (푸르지오 제19-13호)

○ ‘19. 4. 4 : 공사용 가림막 및 보행자 임시통로 설치 현황보고

(남부 감리 2019-55호)

○ ‘19. 4.22 : 공사용 가림막 및 보행자 임시통로 설치 현황보고

(토목부-6859호)

검  토

○ 수로Box 이설 및 신설 방음벽 설치시 지역주민 이동 생활불편해소 필요

○ 공사기간은 18개월이상 소요되는 장기 공사로써 보행자 안전 확보 및 소음저감이 필요함.

구 분	설치위치	당초	변 경	증·감
1) 공사용 가림막 설치 및 해체 (RPP 자립식, H=3.0m)	푸르지오아파트 주변	-	L=325.0 m	증 325.0 m
2) 폴딩도어(B=5m)			2개소	2개소
3) 보행자 통로 설치 및 해체 (목재 Deck, B=1.5m T=21mm)		-	L=185.0 m	증 185.0 m

○ 신규단가 적용율 검토

구 분	신규단가 적용율 근거	비고
신규단가 적용 근거	○관련법규 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 4항의 3(정부에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함한다.) - 공사계약일반조건 제7절 : 계약금액의 조정 1.설계변경으로 인한 계약금액의 조정 나. 항에 따라 - 신규단가 적용율 : ( 100% + 79.998% ) / 2 = 89.999% (단가 협의서첨부)

설계자 검토의견

검토자	관련문서	검 토 의 견	비고
설계자	동일(구조) 제19-1719호	설계당시 재건축공사중으로 반영이 안되어 있었으나, 아파트 입주가 완료되어 공사공사용 가림막 및 보행자 임시통로 설치가 타당할 것으로 판단됨.

개략 공사비 증·감

(단위 : 원)

구 분	금 액
	당 초	변 경	증 · 감
공사용 가림막설치해체		64,329,867	증) 64,329,867
보행자 임시통로 설치 해체		112,933,803	증) 112,933,803
직접공사비 계		177,263,670	증) 177,263,670
제경비		72,641,785	증) 72,641,785
공급가액		249,905,455	증) 249,905,455
부가가치세		24,990,545	증) 24,990,545
도 급 비		274,896,000	증) 274,896,000
관급자재비		1,519,000	증) 1,519,000
공 사 비		276,415,000	증) 276,415,000

감리 검토의견

○ 개봉푸르지오APT 주변의 수로Box 및 본선 방음벽 설치를 위한 공사장 가림막 설치 및 보행자 임시통로 설치에 대하여 검토한 결과 타당하다고 판단됨.

- 현황보고시 개봉푸르지아파트 난간을 사용으로 계획하였으나, 기초 부실 등으로 흔들림 발생이 심하여 안전을 담보할수 없어 난간 설치 및 해체 추가 하였음.

조치의견

○ 개봉푸르지오APT 주변 수로BOX 및 신설방음벽 설치시 지역주민 생활불편 최소화를 위한 공사장 가림막 설치(RPP, 자립형H=3.0m) 및 임시보행자 통로(목재 Deck) 설치방안에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고자 하며,

○ 증액되는 개략공사비276,415천원에 대하여는 추후 본부 설계변경심의(소)위원회 심의결과에 따라 반영하고자 함.

붙임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 현황보고 방침서 1부.   끝.