문서번호	총무과-7916
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
김종민	황차호	김윤규		07/18 백지숙
협 조
	주무관		이호완
	주무관		손명환
	주무관		허민

- 신재생에너지(태양광 + ESS 등) 기술을 활용한 -

난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진 계획

2019. 7.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	검토완료
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	검토완료 (법령, 지침)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	신기술 일자리창출 에너지절감 및 온실가스 감축
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	중앙정부 자원활용
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□	검토완료

- 신재생에너지(태양광 + ESS 등) 기술을 활용한 -

난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진 계획

신재생에너지 기술을 활용, 난지스튜디오를 에너지자립형 창작스튜디오로 조성하기 위한 제로에너지건물(ZEB) 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

◯ 재생에너지 3020 이행계획(산업통상자원부, 2017.12.)

◯「에너지살림도시, 서울」종합계획(기후환경본부 환경정책과-14463, 2014.8.30.)

◯「2022년 태양의 도시, 서울」(기후환경본부 녹색에너지과-22744, 2017.7.11.)

◯ 스마트 미술관 구축을 위한 ICT 기반 에너지효율화사업 3개년 추진계획

(서울시립미술관 총무과-3948, 2019.4.11.)

□ 추진목적(배경)

◯ 에너지자립형 창작스튜디오 조성(마이크로 그리드)

◯ 신재생에너지 기술을 통한 제로에너지건물(Zero Energy Building) 구축

	□ 제로에너지건물(Zero Energy Building)이란?
- 단열성능을 극대화하여 건축물 에너지 부하를 최소화하고(패시브) - 태양광 등 친환경 신재생에너지를 활용하여(액티브) 건물 기능을 위한 에너지 소요량을 최소화하는 건축물

◯ 친환경 신재생에너지 기술을 통한 기후변화 방지와 온실가스 감축

□ 현 황(2018년 기준)

장 소	연면적(㎡)	전력사용량(kWH)	온실가스(tCO2)	비 고
난지미술창작스튜디오 (하늘공원로 108-1)	2,122	261,383	120.079	태양광 70KW, 지열보일러

Ⅱ		추진계획

□ 추진방향

◯ 분산형 전원(電源)을 위한 신재생에너지(태양광) 발전설비 설치

◯ 신재생에너지(태양광) + 에너지저장장치(ESS) 연계한 시스템 설치

◯ 안전한 신재생에너지(태양광, ESS 등) 발전설비 설치를 위한 각종 지침 준수

□ 추진계획(2019~2020년)

◯ 단계별 추진계획(소요예산 포함)

단 계	사업내용	소요예산
		금액(천원)	확보방안
합 계		1,328,000
1단계 (2019년)	태양광 발전설비 설치 (40KW~80KW 예정)	133,000	국고보조금
	ESS(에너지저장장치) 설치	785,000	국고보조금
2단계 (2020년)	*************	*******	****** *************
	**************	******	**********
	**********************	*******	**********

- 예산확보 상황에 따라 사업단계는 조정하여 실시

Ⅲ		달성목표

◯ 제로에너지건물(ZEB) 구축 : 난지창작스튜디오

- 적용기술(방법) : 태양광 발전 + ESS + 노후 냉난방기 교체 등

⇒ 친환경 에너지자립형 창작스튜디오로 자리매김

◯ 에너지사용량과 온실가스 배출량 각각 50% 이상 감축(2016년 대비) 추진

- 에너지 사용량 감축 →  온실가스(미세먼지 포함) 배출량 감축

◯ 녹색뉴딜 사업을 통한 신기술 일자리 창출

Ⅳ		행정사항

◯ 2019년 사업의 원활한 진행을 위해 신속한 사업 진행

- 태양광, ESS(에너지저장장치) 등 세부 사업계획 별도 수립 및 실시

◯ 2020년 사업추진을 위한 예산 확보 철저

- 노후 냉난방기 교체, 쿨루프, 고기밀성 단열창호 교체 등

◯ 사업 추진을 위해 서부공원녹지사업소에 적극적 협조 요청

- 기(旣) 설치 태양광 발전설비(70KW) 관리 이관(서부공원 → 시립미술관)

- 난지창작스튜디오 부지 이용 협조(태양광 발전설비, ESS 등)

- 그 밖의 필요한 사항.  끝.