	서울식물원
수신	내부결재
(경유)
제목	서울식물원 쿨링포그 설치사업 실시설계 용역 준공기한 연기 시행

1. 기획운영과-4886(2019.5.16.)호와 관련입니다.

2. 서울식물원에서 시행중인 □서울식물원 쿨링포그 설치사업 실시설계 용역□에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 합니다.

가. 용 역 명 : 서울식물원 쿨링포그 설치사업 실시설계 용역

나. 계약업체 : 애림조경기술사사무소 대표 강대균

다. 계약금액 : 금10,8000,000원정(금일천팔십만원)

라. 용역기간 : 2019. 5. 24 ~ 2019. 7. 22.

마. 준공기한 연기

1) 당초 : 2019. 5. 24 ~ 2019. 7. 22.

2) 변경 : 2019. 5. 24 ~ 2019. 8. 30.

바. 연기사유 : 서울식물원 공사 준공 및 인수인계 미실시, 시민제안자 의견반영 등에 대한 검토 및 협의를 위한 절대공기 부족

사. 귀책소재 : 서울특별시 서울식물원

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관	김영대		기획행정과장	07/18 문선엽
협조자
시행	기획행정과-153	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2104-9732	/전송		/	imkyd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)