문서번호	건축부-12373
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	07/18 임인구
협조

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

총차 및 2차 계약변경 및 3차계약 시행 검토보고

2019. 7.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

총차 및 2차 계약변경 및 3차 계약시행 검토보고

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』기술자 배치계획 조정에 따른 총차 및 2차 계약 변경 및 3차 계약시행 요청이 접수되어 이에 대하여 검토 보고함

1		용역개요

용 역 명: 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역

용역업체: ㈜희림종합건축사사무소, ㈜토문엔지니어링 건축사사무소

용역기간: ******************************************************

용 역 비: ********************************

2		배치계획 조정 근거

스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행) 과업내용서 6. 건설사업관리기술자 배치

HAP 19-0530-1085호(2019. 5. 30.) 건설사업관리기술자 배치계획 변경 승인 요청

건축부-9374호(2019. 6. 3.) 건설사업관리기술자 배치기간변경 승인 통보

HAP 19-0717-1492호(2019. 7. 17.) 총차 및 2차 계약변경 및 3차계약 요청

3		계약 변경내용

투입계획 변경 사유

- 정보통신공사 상주기술자를 조기투입하기 위한을 위한 건축분야 상주기술자 배치조정(건축상주기술자 3인 → 2인)

※ 총차 용역금액 및 투입 인·일수 변경 없음

배치계획 조정현황

구분	분야	차수	당초	변경	증감
상주	건 축 (중급)	**	*****************	***************** *******************	******
		**	*******************	*****************	******
		***	******************	*******************	******
	통신 (중급)	**	*******************	********************	******
		**	*	*	*
		***	*******************	********************	******

계약금액 변경(총차 및 2차)

구분		당초	변경	증감
**	**	*******************	*******************	****
	**	**************	**************	****
**	**	*******************	*******************	****
	**	************	************	*************
***	**	********************	********************	****
	**	*************	**************	*************

3		3차계약 시행계획

계약 현황 및 발주계획

구분	계약금액	계약기간	비고
총차	**************	`17.9.25.~`20.7.24.
1차	************	`17.9.25.~`18.10.7.	기준공
2차	************	`18.10.8.~`19.7.24.	‘19. 7. 24. 준공예정
3차	************	`19.7.25.~`20.3.24.	금회 발주
잔여분	************	`20.3.25.~`20.7.24.	추후발주 예정

예산과목: 여성정책담당관, 성평등 및 여성복지증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립 추진, 시설비 및 시설부대비, 감리비

6		조치계획

건설사업관리기술자 배치계획 조정에 따른 총차 및 2차 계약변경 및 3차 계약시행 요청건에 대하여 승인하고 계약의뢰하여 조치하고자 함.

붙임 : 건설사업관리용역 계약변경(총차 및 2차) 및 3차수 계약 요청공문 1부.  끝.