＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	서 울 특 별 시 장(녹색에너지과장)
(경유)
제 목	2019년도 신재생에너지 지역지원사업 6월 사업비 집행실적 제출

1. 녹색에너지과-17967호(2019.7.15.) 관련입니다.

2. 『2019년 공공시설 신재생에너지 보급(지역지원)』에 따른 사업비 실집행내역(’19. 6.말 기준)을 붙임과 같이 제출합니다.

사업소명	설치위치	용량 (kW)	예산 (천원)	집행실적 (천원)	진행상황
서부수도사업소	북악터널배수지가압장	18	47,880	-	개발행위허가 추진중
광암정수센터	유지관리동	54	79,002	-	설계용역 진행중
뚝도정수센터	송수펌프동	49	130,340	-	설계용역 진행중
	자양취수장	37	98,420	-
	탈수기동	32	85,120	-
	수리반건물	30	79,800	-
영등포정수센터	2정수장 활성탄흡착지	90	239,400	-	설계용역 진행중
	병물동	52	138,320	-
	풍납취수장	49	130,340	-
	1정수장 송수펌프장	29	77,140	-
암사정수센터	취수펌프장	121	321,753	-	설계용역 및 구조안전진단 진행중
	탈수기동	34	91,929	-
	관리본관	78	206,842	-
강북정수센터	탈수기동 옥상	67	178,220	-	설계용역 진행중
합계	(15개소)	740	1,969,144	-

붙임:  2019년 지역지원사업 사업비 집행실적 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김인준		기전설비과장	조성태		생산부장	07/19 유병기
협조자
시행	기전설비과-7126	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)