문서번호	도시철도사업부-7195
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신교통과장	도시철도사업부장
박노성		김용선	07/19 최병훈
협조			이용주
	주무관		왕태현

『별내선(8호선연장) 건설공사』
국토-경기-서울시간 통합공정회의(1차) 참석결과 보고

2019. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『별내선(8호선연장) 건설공사』
국토-경기-서울시간 통합공정회의(1차) 참석결과 보고

별내선(8호선연장) 건설사업의 국토부-경기도-서울시간 통합공정회의(1차) 참석 결과를 보고 드림

				회의 개요

○ 일    시 : 2019. 7. 17.(수) 14:00

○ 장    소 : 별내선 4공구 종합상황실(구리시 왕숙천로 471)

○ 주    재 : 경기도 철도건설과장

- 참 석 자

․ 국토부 : 대광위 광역시설운영과 채희연 사무관, 이형철 주무관

․ 경기도 : 박경서 철도건설과장, 철도건설2팀장, 철도설비팀장 등

․ 서울시 : 김용선 동북선1과장, 이용주 동북선2과장, 박노성, 왕태현, 이병석 주무관

․ 건설사업관리단 : 별내선 1~6공구 책임건설사업관리기술자

․ 시공사 : 별내선 1~6공구 현장대리인(현장소장)

○ 주요 회의내용

- 공정 현황 및 주요공사 추진계획/실적 보고

- 기타 현안사항 보고 및 토의

				회의 결과

○ 공구별 보고내용 : 세부내용은 붙임 회의자료 참조

- 1공구

․ 공 정 율 : 계획 17.9%, 실적 17.9%(계획대비 100%)

․ ***************************************

- 2공구

․ 공 정 율 : 계획 18.12%, 실적 18.12%(계획대비 100%)

․ **********************************

- 3공구

․ 공 정 율 : 계획 30.72%, 실적 28.58%(계획대비 93.5%)

․ ********************************************************************************************

- 4공구

․ 공 정 율 : 계획 40.93%, 실적 39.05%(계획대비 95.41%)

․ *********************************************

- 5공구

․ 공 정 율 : 계획 54.40%, 실적 52.36%(계획대비 96.26%)

․ *********

- 6공구

․ 공 정 율 : 계획 50.77%, 실적 50.85%(계획대비 100.16%)

․ *********

○ 당부사항

**********************************************************

***************************************

************************************************************

**************************************************************************

				향후 계획

○ 제2차 국토부-경기도-서울시간 통합공정회의 개최(장소 : 서울시)

붙임 : 회의자료(PPT포함) 및 회의사진 각1부.  끝.