문서번호	방재시설부-10757
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	07/19 代진재섭
협 조
	주무관			박영우

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설(플랜터,트랜치) 변경 실정보고 검토보고

2019. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설(플랜터,트랜치) 변경 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『노들섬 특화공간 조성공사』책임건설사업관리기술자로 부터 조경시설

(플랜터,트랜치) 변경설치에 따른 실정보고 사항이 있어 검토하여 보고

드림. [관련공문 : 유탑노들 제19-340호(2019.07.17)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6 일대 (노들섬)

○ 규    모 : 연면적 9,854㎡ (지상3층 4개동 : 업무시설, 문화 및 공연시설)

□조경공사 : 수목식재(교목299주, 관목9,634주), 조경시설 31종 등

○ 기    간 : 2017.10.26 ~ 2019.10.20

○ 도 급 비 : 159억원 (조경 26억원)

Ⅱ		실정보고 내용

○ 보고내용

- 서측 멀티스튜디오 3층 데크 및 동측 다목적시설 옥상전망데크내 설치

예정인 초화류 식재플랜터 삭제 (2개소)

▪동・서측 건물 3층에 설계되어 있는 조경시설 플랜터A(H400㎜)는

건물옥상의 안전난간에 접하게 계획되어, 이용자 안전사고(추락) 우려

□플랜터 위로 올라가 경관을 조망 할 경우 안전난간 높이 부족

⇒ H1200㎜-H400㎜=H800㎜

⇒ 설계사 철거 의견반영 : 엠엠케이플러스 제*******01(‘19.3.29)

- 서측 2층 옥상 건물주변 배수시설 재배치

▪여름철 집중호우시 빗물의 건물과 엘리베이터 내부유입 방지를 위해

자갈수로 및 트랜치 재배치

□배수기능이 우수한 트랜치(H150㎜~400㎜) 추가설치 : 30.2m

□자갈수로(H150㎜) 물량은 조정 : 404.3m→341.8m(감62.5m)

○ 도급비 승인요청                                  (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
계			43,782		43,980	증)198
플랜터 설치	㎡	1,112	29,738	896	23,601	감)6,137
트랜치A-1,B-1	m	-	-	30.2	6,176	증)6,176
자갈수로	m	404.3	3,149	341.8	2,662	감)487
제경비	식	1	10,895	1	11,541	증)646

Ⅲ		검토보고

○ 3층 옥상 플랜터 삭제 (2개소)

- 이용자가 건물 3층 옥상 플랜터에 올라갈 경우 옥상 추락방지 안전난간

높이가 낮아져, 추락의 위험성이 높아 삭제하는 것이 바람직함

□향후 서울세계불꽃축제시 노들섬은 한강여의도 조망의 최적지로 일시에 많은

인파가 움집하여, 조망을 위해 높은 곳에 자리 할 가능성이 매우 높음

○ 서측 2층 건물주변 배수시설 개선

- 트랜치는 자갈수로에 비하여 배수기능이 우수하여 신속한 빗물배제로

건물 및 엘리베이터내 빗물 유입을 방지할 수 있음

○ 신규비목 설계변경 적용

- 협의단가(강제협의율) 적용 : 91.048% [낙찰율(82.096%)+100%]/2

Ⅳ		보고자 의견

○ 조경시설물 변경설치에 대한 책임건설사업관리기술자의 의견이 타당하다고

판단되어 제출한 실정보고는 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가분은 추후 설계변경시 반영하도록 책임건설사업관리

기술자에게 통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 플랜터 위치 및 배수시설 변경도면 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 기술검토 의견서 1부.  끝.

플랜터 위치 및 배수시설 변경도면

플랜터 위치 (서측 멀티스튜디오 3층, 동측 다목적시설 3층 옥상전망데크)

배수시설 변경도면 (트랜치A-1, B-1)