투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(총액) 납품기한 연장 의뢰[서울바이오허브조성(2단계) 기계설비공사]

1. 설비부-11005(2019.7.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘서울바이오허브조성(2단계) 기계설비공사’ 관련, 관급자재 대하여 납품기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연장 내용

품 명	계약자	계약번호 (납품요구번호)	납 품 기 한		비 고
			변경 전	변경 후
엘리베이터	㈜신일승강기	12182036900	2019.8.14.	2019.10.18.	계약금액 변경없음
지열시스템	㈜제이애지	12182129300
자동제어	이에스콘트롤스㈜	12182162901

나. 연장사유 : 건축공사 공정에 맞춰 후속 공종 관급자재 납품일정 조정

다. 납품기한 연장 귀책소재: 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과 여부: 미부과

별 첨 : 1. 보고서 1부.

2. 합의서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박갑임		시책사업과장	이종근		설비부장	07/19 임정규
협조자
시행	설비부-11049	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/	hanadaba@seoul.go.kr	/	부분공개(5)