투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	이원전기
(경유)
제목	작업지시(1차-오니처리 전기시설물) 변경

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소와 계약체결 시행중인 「2019년 중랑물재생센터 오니처리 전기시설물      유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 제1차 작업지시를 아래와 같이 변경하오니 기한내      작업을 완료하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 2019년 중랑물재생센터 오니처리 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 변경사유 : (1) 메일 착·발신 오류로 인하여 작업이 지연됨

(2) 작업내용의 변경(붙임내역서 참고)

다. 금차작업기간 : 2019. 6. 27. ~ 7. 11.

변경작업기간 : 2019. 7. 22. ~ 8.  5.(15일)

라. 지시사항

1) 밀폐공간 작업 시 안전유의

2) 작업완료 보고서류 제출

붙임 1 :  작업지시서(1차) 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	유재우		시설보수과장	07/19 임준빈
협조자	주무관	안종필
시행	시설보수과-4084	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 본관 3층 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2555	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)