투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	공사기간 연장 변경 계약 의뢰(서울바이오허브조성(2단계) 기계설비공사_TAB용역)

1. 설비부-11005(2019.7.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘서울바이오허브 조성(2단계) 기계설비공사’ TAB 용역에 대하여 다음과 같이 공사기간 연장 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 내역

건 명	계약자	당 초	변 경	비 고
T.A.B용역	한미설비㈜	‘18.03.05.～ ‘19.08.30.	‘18.03.05.~ ‘19.10.31.

※ 공사금액 : 변경없음

나. 연기사유 : 건축공사 공정에 맞춰 준공기한 연장이 필요함

다. 공사기간 연장 귀책기관 : 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

별 첨 : 1. 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박갑임		시책사업과장	이종근		설비부장	07/19 임정규
협조자
시행	설비부-11016	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/	hanadaba@seoul.go.kr	/	부분공개(5)