문서번호	기반시설과-2215
결재일자	2019.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	07/22 전영주
협 조

『성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설부

『성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역』

준공기한 연기 검토보고

한강공원 이용 편리성과 접근성 향상을 위해 시행중인 「성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역」준공기한 연기 검토 및 처리계획을 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 기본 및 실시설계 용역

○ 대 상 지 : 성수대교 북단, 올림픽대교 남단, 동작대교 북단

○ 과업내용 : 승강기 및 비상계단 설치 3개소 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2018. 11. 29 ~ 2019. 7. 31

○ 계약상대자 : ㈜대한콘설턴트 대표 이진산

○ 용 역 비 : 116,736천원

2		준공기한 연기사유

○ 하천점용허가 관련 국토관리청 협의에 필요한 수행기간 소요

○ 최종 설계자문사항 보완에 필요한 추가기간 소요

3		준공기한 연기내역

○ 준공기한 연기

가. 당   초 : 2019.7.31

나. 변   경 : 2019.8.30

다.귀책소재: 한강사업본부

4		조치계획

○ 상기와 같은 내용으로 준공기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함. 끝.