문서번호	시설관리과-15831
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		김효수	07/23 고신석
협조

공사현장 실정보고에 대한 검토보고(1구간)

(문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사)

2019. 7.

시설관리과

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사)

『문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울시설공단으로부터 현장 실정보고가 제출되어 검토 후 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 문래동2가 36-9~26번지 외 9개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2019.04.29.~2019.11.16.

○ 도 급 액 : 666,993,030원

○ 공사개요 : D=80~300mm, L=2,253m

○ 계약업체 : *************

○ 관련공문 : 공사감독2처-9861(2019.07.23.)

□ 실정보고 내용

○ 야간공사 시행(1구간)

- 현황 및 문제점 : 당초1구간은 주간에 D=300mm, L=230m를 관부설토록 설계되어 있으나 작업위치가 왕복6차로(버스전용차로 포함) 옆 철공소가 밀집해 있는 보도에서 예정되어 있어 주간 작업시 교통흐름 방해 및 특성상 차량 진출입이 많은 철공소 영업에 지장을 줄 것으로 사료됨.

-	검토의견 : 작업 중 주변 교통의 원활한 흐름과 보행자의 안전사고 예방을 위하여 주간에서 야간으로 변경하여 작업시행(영등포구청에서 도로굴착허가 야간으로 승인)

- 개략공사비 : 증) 33,780천원

□ 조치의견

○ 상기 사항에 대하여 우선 공사 시행하고, 향후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 회신코자 함  끝.

붙임  1. 공사현장실정보고서 관련공문  각1부.  끝.