문서번호	생태환경과-1724
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		최병언	07/23 김인숙
협조

- 2019년 뚝섬 그라스정원 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2019. 7.

한강사업본부

생태환경과

- 2019년 뚝섬 그라스정원 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

울창한 한강숲 조성을 위하여 시행중인「2019년 뚝섬 그라스정원 조성사업」과 관련 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-5953(2019.07.16.) 공사현장 실정보고 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 뚝섬 그라스정원 조성사업

○ 공사기간 : 2019. 5. 02. ~ 2019. 7. 30.

○ 주요내용 : 암석원 및 초화 화단 조성

∙수 목 :  스카이로켓향나무 등 923주

∙초화류 :  샤스타데이지 등 54,240본

○ 도 급 액 : 금189,325,190원

○ 도 급 자 : 정우조경주식회사 대표 방정혁

▢ 실정보고 사항

구 분	변경사유 및 변경 요청	승인여부
시설물 공사	○ 식재지 보호를 위한 잔디보호휀스 설치	승인
	▸ 식재지 보호를 위하여 시설물 반영 - 잔디보호휀스 설치(H1.0) : 0 → 280EA
	○ 암석원 조성 시, 경관향상을 위하여 마운딩 및 현무암골재 색상을 변경하고 이에 따른 부자재 물량 조정
	▸ 경관향상을 위하여 암석원 변경
식재 공사	○ 기존 제거로 계획된 관목류 중 생육상태가 양호한 수목은 이식으로 변경
	▸ 현장 내 관목제거(H0.3~0.7) : 900주 → 630주 ▸ 관목이식(H0.3~0.7) : 0 → 270주
	○ 현장 내 존재하는 초화류는 생육상태가 양호하여 이식
	▸ 초화류이식(H0.9m이하) : 0 → 500본
구 분	변경사유 및 변경 요청	승인여부
부대 공사	○ 다채로운 경관 조성을 위하여 일부 식재수종 변경 및 신규수종을 추가하고, 전체적인 식재 위치 조정	승인
	▸ 노랑말채나무(H1.0*W0.4) : 13주 → 0 ▸ 흰말채나무(H1.0*W0.4) : 15주 → 0 ▸ 블루엔젤(H1.0) : 0 → 3주 ▸ 블루엔젤(H2.0) : 0 → 3주 ▸ 블루엔젤(H2.4) : 0 → 3주 ▸ 흑희산수국(H0.4*W0.6) : 0 → 700주 ▸ 왕원추리(2~3분얼) : 0 → 1,500본 ▸ 은사초(10cm) : 0 → 1,000본 ▸ 바브흐눈향(10cm) : 0 → 500본 ▸ 홍띠(15cm) : 2,360본 → 2,580본 ▸ 검정사초(15cm) : 1,400본 → 0 ▸ 가는잎보리사초(15cm) : 0 → 1,400본
	○ 식재계획변경에 따른 수종 및 물량 조정 필요
	▸홍띠(15cm) : 2,360본 → 2,580본 ▸검정사초(15cm) : 1,400본 → 0 ▸가는잎보리사초(15cm) : 0 → 1,400본
	○ 암석원 내 경계엣지는 재료분리의 기능이 부족하여 잔디 경계 식재 추가
	▸잔디경계식재(0.18*0.18*0.03) : 0 → 187m
	○ 생육상태가 불량한 잔디 폐기 및 잔디 떼뜨기 물량 조정
	▸ 잔디떼뜨기 : 1,987.75㎡ → 100㎡
	○ 현장여건에 맞게 관목 이식 수량 조정
	▸관목이식(H0.8~1.1) : 3,050주 → 1,120주
부대 공사	○ 공원 이용시민의 안전 우려 및 비산먼지 발생억제 조치로 가림막휀스(H1.8m 이상) 설치가 필요
	▸가림막휀스(H1900*W2400) : 0 → 100경간
	○ 잔디떼뜨기 작업 시 생육이 불량한 잔디 등으로 인한 폐기물 발생
	▸혼합폐기물 상차(BH0.7㎥) : 0 → 31.46㎥ ▸ 혼합폐기물 : 0 → 39ton

▢ 계략 설계변경 금액 : 증17,074천원

구 분		공사비(원)		증감	비고
		당 초	변 경
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부 가 세	************	**********	*********
	도급비 계	***********	***********	**********
관 급 비		**********	**********	*********
총공사비		***********	***********	**********

▢ 예산활용 계획

○ 예산잔액 및 낙찰차액을 활용하여 집행

(단위 : 백만원)

예 산 액 (A)	발주금액 (B)	계약금액 (C)	예산잔액 (A-B)	낙찰차액 (B-C)	비 고
350	310	285	**	**

○ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 한강숲 조성, 시설비(100-401-01)

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고서 승인요청 공문 1부. 끝.