투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	변경계약의뢰(준공기한연기)

1.기반시설과-2215(2019.7.22)호와 관련입니다.

2.위호와 관련하여 추진중인 성수대교북단외2개소 승강시설치 기본 및 실시설계용역에 대하여 이래와 같이 변경계약(준공기한 연기)요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

1) 용 역 명: 성수대교북단외2개소승강기설치용역기본및실시설계용역

2) 계약기간: 2018.11.28.~2019.7.31

3) 도급금액: 116,736,000원

4) 도 급 사: ㈜대한콘설턴트 대표 이진산

나. 변경계약내용

1) 준공기한연기 : 당초 2019.7.31 ⇒ 변경: 2019.8.30

2) 도급금액 : “변경없음“

다) 연기사유 : 하천점용허가 관련 국토관리청 협의 소요기간 필요

최종설계자문에 결과 반영에 따른 추가기간 필요

라)지체상금 부가여부 : 미부과

따로붙침: 준공기한연기 보고서 1부. 끝.

	기반시설과장
주무관	김일문		기반시설과장	07/23 라철흠
협조자
시행	기반시설과-2218	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개