“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	궁능유적본부장(복원정비과장)
(경유)
제목	경복궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업 소요예산(2020년) 변경 제출

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문화재청과 우리시가 공동으로 추진 중인 「경복궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업」과 관련하여, 2020년 소요예산을 붙임과 같이 변경 제출합니다.

<변경사항>

가. 변경사유

○ 경복궁 광화문 월대 복원을 위해 현재 월대 상부에 위치한 사직로를 이설함에 따라 저촉되는 정부서울청사 시설에 대하여 이설비(설계, 공사비 등) 추가 소요 필요

※ 당초 대통령 집무실 이전 공약에 따른 정부서울청사 재배치와 연계 추진할 예정이었으나, 2019.1월 관련 공약 보류됨에 따라 불가피하게 사업비 추가 요구됨

나. 변경사항

○ 이설비 추가 : 정부서울청사 저촉시설 이전 및 재배치 등 150억원(국비 75억원) 추가

※ 현재 기본 및 실시설계 시행중으로 사업비는 설계 결과에 따라 변경될 수 있음

붙임 : 예산 소요 신청서(변경) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	진명국		광장계획팀장	이강수		광화문광장사업반장	07/24 임창수
협조자	주무관	주미
시행	광화문광장추진단-8846	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7739	/전송	02-2133-0894	/	civiljmk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)