문서번호	기전과-5513
결재일자	2019.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
김헌경		07/24 정판식
협조

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(1차 작업지시)

2019. 07.

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』 실정보고 검토 보고(1차 작업지시)

『2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』와 관련하여 감리업체로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1. 관련근거

❍ 2019년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 1차 작업지시

[기전과-3363(2019.05.08.)]

❍ 1차 작업지시 실정보고서 제출 건

[(주) 트래픽스 TR-본19-0704(2019.07.19.)]

2. 공사개요

❍ 공 사 명: 2019년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

❍ 공사위치: 강남구 외 3개구 교통신호기 설치

❍ 공사내용: 교통신호기 신설 및 개량 1식

❍ 계약업체: ㈜다옴건설 대표 이창석

❍ 계약금액: 금387,477,900원

❍ 계약기간: 2019. 2. 18. ~ 12. 27.

❍ 감리업체: ㈜ 트래픽스  대표 김희수

3. 제1차 작업지시 내용

❍ 작업기간: 2019. 5. 10. ~ 2019. 7. 22.

❍ 작업대상: 강남 자곡로21 세곡푸르지오 앞 교차로 외 3개소

4. 실정보고 내용

지시연번	공사위치	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과	비고
1	자곡로21 세곡푸르지오 앞	신호기(차/보) 및 경보등 신설을 완료하였으나 토목공사(보도 턱 낮춤 및 가드레일 제거 등) 지연으로 신호 운영이 불가피함	공기연장 요청 당초 19. 7. 22. 변경 19. 7. 30.	적정
2	역삼로 519	〃	〃	〃
3	밤고개로21길 69	〃	〃	〃
4	자곡로 자곡래미안힐즈 앞	〃	〃	〃

5. 조치의견

❍ 감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정하다고 판단되어 실정보고를 승인하고 1차 작업기간을 연장 하고자 함.

붙임  제1차 작업지시 실정보고 1부.  끝.