투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)민정토건 대표 백승언
(경유)
제목	제7차 작업기한 연장 통보(2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사-연간단가)

1. 민정한강 2019-0706호(2019.07.19.)와 관련입니다.

2. 「2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)」제7차 작업기한 연장 승인요청 건에 대하여 아래와 같이 원안 승인 통보하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 작업기한 변경 승인내역

구 분	당초	변경	사 유
제7차 작업지시	2019.07.31	2019.08.30	현장조사 및 장마철 강우에 따른 작업지연

붙임 : 작업기한 연장요청서 1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	나병윤		기반시설과장	07/24 라철흠
협조자
시행	기반시설과-2254	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개