문서번호	기전과-8095
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
천흥규		정법관	07/25 서수일
협조

설 계 변 경 보 고

[2019년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

서부도로사업소

(기전과)

설  계  변  경  보  고

[2019년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)]

2019년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가) 추진 중 발생한 시공물량 증감 및 보험료에 대하여 설계변경 정산코자 함.

□ 관련근거

○ 기전과–1674(2019. 02. 20.)호: 제1차 작업지시

○ 기전과–2636(2019. 03. 18.)호: 제2차 작업지시

○ 기전과–4904(2019. 05. 09.)호: 제3차 작업지시

○ 기전과–6822(2019. 06. 25.)호: 제4차 작업지시

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 계약상대자 : (주)에스엠전력 대표 김동률

○ 계약금액 : 일금일억일천오십이만칠천이백이십원(￦110,527,220)

○ 계약일자 : 2019년 02월 11일

○ 착공일자 : 2019년 02월 18일

○ 공사기간 : 2019. 2.18. ~ 2019.12.31.

○ 공사내용 : 도로터널 소방시설물 유지보수 등 1식

○ 공사위치 : 남산1·2·3호터널, 금화·월드컵·봉산터널 및 관리실

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전

시설물 일상유지보수, 시설물 및 부대비, 시설비

□ 설계변경금액

(단위 : 원)

구분		당초금액	변경금액	증·감		비고
총공사비		110,527,220	115,692,000	증)	5,164,780
도급비	공급가액	100,479,291	105,174,545	증)	4,695,254
	부가가치세	10,047,929	10,517,455	증)	469,526
	계	110,527,220	115,692,000	증)	5,164,780

□ 주요설계변경 및 정산내역

○ 시공물량 증감(직접비) : 증) 8,193,534원

공 종	단위	물량		증·감	비 고
		변경전	변경후
소화전기동확인등(교체)	EA	10	13	증) 3A
회로단선(선로보수)	회로	20	57	증) 37회로
가요성알루미늄피케이블교체	M	10	1500	증) 1490M
1종금속가요전선관배관(고장력방수)	M	18	311	증) 293M
거리표시유도등 수리	EA	3	5	증) 2EA
소화기위치표시등 제작교체	EA	3	24	증) 21EA
유량계교체	EA	0	1	증) 1EA	신규공종
게이트밸브 교체	EA	0	1	증) 1EA	신규공종
스모렌스체크밸브교체(D65)	EA	0	2	증) 2EA	신규공종
후렉쉬블죠인트교체(D65)	EA	0	2	증) 2EA	신규공종
압력탱크교체	EA	0	1	증) 1EA	신규공종
노이즈필터	EA	0	1	증) 1EA	신규공종
긴급전화 위치표시등 이설	EA	0	6	증) 6EA	신규공종
자동화재속보설비	대	0	1	증) 1EA	신규공종
그루브조인트 교체(D100)	개소	5	0	감) 5개소
옥내소화전함 제작교체	EA	2	0	감) 2EA
관보온재(고무발포 25T D100)	M	100	10	감) 90M
동파방지열선	M	100	0	감) 100M
절연난연PVC시스케이블	M	150	0	감) 150M
소화전함 개폐불량 문짝수리	EA	10	2	감) 8EA
R형 중계기(교체)	EA	50	36	감) 14EA
피난구 유도등(교체)	EA	10	2	감) 8EA
R형수신반수리	식	2	1	감) 1EA
죠인트박스설치	EA	9	0	감) 9EA

※ 자세한 사항은 변경설계서 참조

○ 제경비 정산액 : 감)5,097,255원

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료: 감)3,035,519원

- 산업안전보건관리비 : 감)2,061,736원

□ 검토의견

○ 설계변경내역서와 같이 시공물량 증감 및 미사용 보험료 등 제경비

정산반영하여 설계변경시행코자 함.

□ 조치사항

○ 설계변경(내역)에 대하여 변경계약 요청 ⇒ 관리단속과

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.