문서번호	시설보수과-6486
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	07/25 박문희
협 조
	주무관			강연홍

중간보고회 및 자문회의 결과보고

① 도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀점검용역

② 목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외1개소 정밀점검용역 정밀점검용역)

2019.  7.

강서도로사업소

시설보수과

중간보고회 및 자문회의 결과보고

금년 용역 시행 중인『도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀점검용역』외 1건에 대한 중간보고회 및 외부전문가 자문회의 개최 결과를 보고 드림

Ⅰ				회의개요

일  시 : 2019. 7. 22(월) 14:00~16:00

장  소 : 2층 회의실

참석자 : 총20명

○ 사업소(5명) : 사업소장, 시설보수과장, 담당자외2

○ 용역사(9명) : 사업책임기술자 외 다수

○ 자문의원(6명) : 외부4, 내부2

- ㈜장민이엔씨 원장 서외택

- ㈜대한콘설탄트 부사장 최용기

- 백산엔지니어링(주) 대표 박훈규

- 다올이앤씨(주) 상무 성연규

- 교량안전과 강구조교량팀장 박찬규

- 남부도로사업소 시설보수과장 김준섭

		◀ 중간보고회 및 자문회의

중간보고회 대상 용역

용 역 명	용역기간	용역사	사업책임기술자
도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀점검용역	2019.3.27.~ 11.21	(재)한국건설품질연구원	진 남 희
목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외1개소 정밀점검용역	2019.3.25.~ 11.19	㈜세안안전진단	박 종 성

Ⅱ				용역별 보고내용

외관조사 결과 손상원인 및 보수방안 보고

재료시험 결과 및 상태평가 결과 보고

교량받침, 거더, 교량기초 등 주요 부재에 대한 이상 유·무 보고

착수보고회 시 보완사항 이행여부 등 기타

Ⅲ				회의결과 주요내용

외부전문가 자문 의견서

○ 자문 의견서 : #별첨

공통사항

○ 교량상부 빗물 체수 여부에 대하여 우기후에  조사하여 사진과 함께 수록할 것.

○ 외관조사 결과에 의한 주요 손상 물량에 대하여 전차용역과 비교하여 증·감여부를    보고서에 수록할 것.

○ 시설물별 부속시설물(가로등,방호울타리,빗물받이,교통표지판,첨가물등)에 대히여

설치사진, 설치규격, 설치수량을 위치도와 함께 수록해줄 것.

도림천복개(좌안)

○ 구조물 옹벽구간 빗물 유입으로 인한 교량받침 부식 구간에 대해 면밀한

원인분석 후 보수 방안을 제시할 것.

○ 도림천오거리 슬라브 하면 철근노출 부위에 대해 면밀한 원인분석 후    보수방안을 제시할 것.

○ 내진보강공사 당시 시험굴착 결과를 토대로 확인된 교각 높이(H)를

기존 도면과 비교하여 수정 보완해 줄 것.

도림천하류복개

○ 교대 벽면(A1) 수발공 설치 제시 안에 대하여 다시한번 추가조사를 통해    재검토하고 설치필요시 세부사항 제시해 줄 것.

목동교(구교)

○ 금회 실시한 재하시험 결과에 대해 전차 용역과 비교분석하여 제시해줄 것.

○ 금회 바닥판 거더 균열 발생구간에 대해 전차 용역과 비교분석하여

증·감 여부를 제시해 줄 것.

○ 기타 자문위원별 검토(요구)의견 반영

가리봉철도고가

○ 바닥판(S11) 거더 콘크리트 박락 및 철근부식 부위에 대해 추가 손상부위는    없는지 상세히 조사하여 중간보고회(2회)시 보고해줄 것.

○ 기타 자문위원별 검토(요구)의견 반영

Ⅳ				조치계획 및 향후계획

중간보고회 시 보완 및 지적된 사항에 대해 용역사 통보 조치

중간보고회(2회) 개최

○ 목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외1개소 정밀점검

- 2019. 8월말 : 중간보고회(2회)

자문회의 및 최종보고회 : 2019. 9월

건설기술심의 : 2019. 10월

용역준공 : 2019. 11월

첨부  외부전문가 자문 의견서 각 1부.  끝.