문서번호	기반시설과-2267
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기반시설과장
박관호		07/25 라철흠
협조
	주무관		임영준

제2차 실정보고 검토

- 달빛무지개분수 제7,8차 작업 기간연장 -

2019. 07.

한강사업본부 시설부 기반시설과

실정(기한연장) 검토 보고

<2019년 달빛무지개분수 유지보수 공사>

「2019년 달빛무지개분수 유지보수 공사」추진 중 달빛무지개분수 제7, 8차 무선음향설비 개선 작업지시와 관련 우천으로 작업기간 연장 요청 검토 보고 임.

□ 계약 현황

○ 공 사 명: 2019년 달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)

○ 계약금액: 금464,529천원(상림조경(주) 대표 임민영)

□ 작업지시 현황

○ 지시번호 : 제2019-7호

- 작업기간 : `19.07.02. ~`19.07.24.

- 작업금액 : 금38,649천원

- 지시내용 : 무선IP 전송안테나 송신기 설치 외11종

○ 지시번호 : 제2019-8호

- 작업기간 : `19.07.08. ~`19.07.29.

- 작업금액 : 금28,780천원

- 지시내용 : 음향 IP 송신기 Encoder 설치 외1종

□ 실정보고 내용

공종	현황 및 문제점	대책	검토 결과	변경사항
무선음향설비 개선 작업	▷ 우천일 : 7월 - 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 총15일간 발생	▶ 음향설비 선로 점검 및 결선 검토 등 안전사고 예방과 무선음향설비 설치공사를 위하여 작업 기간을 8월2일 까지 연장	적정	작업 기간 연장 (`19.08.02.까지 연장)

□ 담당자 검토 의견

*********************************************************************

□ 실정보고 조치사항

****************************************************************************************

○ 작업 내용 : 변경 없음

○ 작업 금액 : 변경 없음

붙임 : 작업 기간 연장 검토 요청(공문) 1부.  끝.