투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 수량 변경 요청 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

우리부에서 시행중인 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 시공계획변경 등에 따른 관급자재 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 변경 사유 : 예정공정 및 시공계획 변경 등

○ 변경 내용

납품요구번호	품목	규 격	단위	구 매 수 량			납품기한	비 고 (사유)
				당 초	변 경	증 · 감
121911970400	아스팔트콘크리트	WC-1, 표층용	톤	495	989	증) 494	‘19. 12. 31.	시공계획 변경에 따른 포장공 수량 조정
		BB-3, 기층용	톤	1,374	1,699	증) 325
		MC-1, 중간층용	톤	469	826	증) 357

끝.

	토목부장
주무관	이현국		터널건설과장	代김동수		토목부장	07/25 김용제
협조자
시행	토목부-13343	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	leehk1@seoul.go.kr	/	대시민공개