문서번호	급수운영과-15285
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이준규	代윤승구	07/25 代이문성

단 수 작 업 계 획 서

(2019년 도봉구관내 급수공사(안골마을 노후관개량))

2019. 7.

북부수도사업소

급수운영과

단 수 작 업 계 획

(2019년 도봉구관내 급수공사(안골마을 노후관 개량))

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2019년 도봉구 관내 급수공사 (장기계속단가계약)

- 공사개요 : ************************

****************

- 시공회사 : ***************

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
***	************	*************	************* *****	****	***** ******
***	*********	*************	*************	****	*****

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	10분	********************************
		********************************
퇴 수	10분	**********************
기존관절단	20분	**************************************
배관	300분	********************* *************************** **********************
제수밸브설치	10분	*************************
세척 및 통수	20분	**********************
합 계	6시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	100	m	50
2	KP이음관	100	개	8
3	KP소켓곡관(B형)	100×45	개	6
4	플랜지관	100×650	개	2
5	KP소켓플랜지T형관(B형)	100×100	개	2
6	2F단관	100×500	개	1
7	제수변(다용도밸브)	100	개	1
8	이탈방지압륜	100	개	23
9	KP고무링	100	개	23
10	KP볼트	24×85	개	69

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계				*
1	용접공
2	배관공	*******	*****	**
3	특별인부	*******	****	**
4	보통인부	*******	*****	**

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획 ***********************************************************

*******************************************

************

******************************************************

******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************************** *******************************	********* *************
업 체	************* ************ ************	*************

□ 시험굴착계획 :

○ 2019. 4. 25. 시험굴착 계획

○ 2019. 4. 29. 시험굴착 확인

- 기존관 : 100㎜/CIP

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

○ 공사안내간판, 현수막

○ 휀스, 유도등

○ 교통안내원 배치등

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2019. 8. 01.(월)

○ 단수시간 : 10:00 ~ 12:00 (다용도밸브 신설 30분)

09:00 ~ 16:00 (노후관개량)

○ 단수지역 : ****************

○ 단수세대 : ******************

***********

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	***	*	****	*******
	2	**********	***	*	*********	*******

〇 통  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	***	*	****	*******
	2	**********	***	*	*********	*******
퇴수밸브	1	**********	***	*	*********	*******

밸브조절 위치도

붙 임 : 단수 홍보 안내문(55세대, 25세대) 각 1부.  끝.