투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역 변경계약 의뢰

1. 슬러지 건조시설(증설) 준공 지연에 따른 TMS설비 유지관리 용역 계약변경 계획(운영과-5403호, 2019.7.25.)과 관련입니다.

2. 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역의 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역

나. 계약기간 : 2019.4.1. ~ 2019.7.31.

다. 계약업체 : *************

라. 변경내용 : 계약금액 및 계약기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘19.4.1.~7.31.	‘19.4.1.~10.31.	3개월 연장
계약금액(원)	**********	**********	***********

마. 변경사유 : 슬러지 건조시설(증설) 설치공사 준공 지연

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 1. 슬러지 건조시설(증설) 준공 지연에 따른 TMS설비 유지관리 용역 계약변경 계획 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	운영과장
주무관	신정현		운영과장	07/25 최영효
협조자
시행	운영과-5406	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)