문서번호	교량안전과-13126
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		이홍재	07/25 김종호
협조	특수교량팀장		代서성만
	강구조교량팀장		박찬규

-‘20년 시설물 보수공사 실시설계 - 건설사업관리(설계감리)용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

안전총괄실

(교량안전과)

-‘20년 시설물 보수공사 실시설계 -

건설사업관리(설계감리)용역 시행계획

2020년 시설물 보수공사 실시설계 대상사업에 대하여 건설사업관리(설계감리)용역을 시행하여 내실있는 설계품질을 확보하고자 함

⇒ 대상공사 : 동작대교 보수공사외 4건

⇒ 총공사비 : 19,251,000천원

⇒ 건설사업관리(설계감리) 용역비 : 258,225천원

Ⅰ		관 련 근 거

□ 건설기술진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행) 및 같은법    시행령 제57조(건설사업관리 대상 설계용역)

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및        제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물 건설공사의 기본설계        및 실시설계용역

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용역규모 : 동작대교 보수공사외 4건 실시설계 건설사업관리(설계감리)

□ 용역기간 : 착수일로부터 3개월 ※실시설계 기간과 연계

□ 총용역비 : 258,225천원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 입찰참가 자격

-『건설기술진흥법』 제26조 및 같은법 시행령 제44조에 따라 건설

기술용역업체(종합 또는 설계, 사업관리)로 등록된 업체로서 주된

영업소의 소재지가 서울특별시에 있는 업체

Ⅲ		실시설계 대상공사 현황

□ 공 사 명 : 동작대교 보수공사 외 4건

□ 총공사비 : 19,251,000천원

□ 건설사업관리(설계감리) 용역비 : 258,225천원

연 번	공사명	총공사비 (천원)	주요공종	용역비 (천원)	담당자 (연락처)
합 계		19,251,000		258,225
1	동작대교 보수공사	3,196,000	교면방수 및 포장 85.3a 상판보수 573㎡ 데크 철거 및 설치 613㎡ 전단키 설치 및 기초보강 6개소	51,348	특수교량팀 서 성 만 (2133-1952)
2	이수고가 보수공사	3,140,000	- 교량인상 및 받침교체 152개소 - 기초보강 17개소	51,348	강남일반교량팀 남 덕 희 (2133-1974)
3	보라매고가 보수공사	6,662,000	단면보수 740㎡, 표면처리 2,181㎡, 강재도장 16,500㎡, 받침교체 68개소, 기둥보강 228개소, 신축이음장치교체 37m, 배수시설 정비 등	52,987	강남일반교량팀 이 재 우 (2133-1975)
4	영동대교 보수공사	4,453,000	- 콘크리트 바닥판 보수 2,700㎡ - 바닥판 철거 재시공 40㎡ - 교면포장 19.4a	51,975	강구조교량팀 이 제 택 (2133-1963)
5	천호대교 보수공사	1,800,000	교면방수 및 포장 33a 토공부 포장 47a 중앙분리대 종조인트 덮개 교체 1,150m 콘크리트 단면보수 25㎡ 상판보수 325㎡ 받침교체 23개소 등	50,567	강구조교량팀 장 재 연 (2133-1962)

Ⅲ		용역발주 계획

□ 용역비 검토

○ 건설사업관리(설계감리) 용역비는 총 공사비 2000억원 미만인 경우

공사비에 따른 용역금액에 큰 차이가 없음

○ 용역비 산출결과

연 번	용 역 방 법	용역비 (천원)	비 고
1	사업별 개별 시행	258,225
2	전체공사 통합 시행	66,143
3	동작대교,이수고가,보라매고가	60,544	팀별 개별 시행 (특수팀+강남팀)
	영동대교, 천호대교	55,011	팀별 개별 시행 (강구조팀)

□ 발주계획

○ 용역비 검토결과 통합시행 시 용역비 예산절감에는 가장 유리하나

실시설계 품질관리 및 공정관리에 불리 함

○ 용역품질 확보와 효율적인 관리, 감독을 위해 2개 용역으로 분리 시행

연 번	용 역 명	용역비 (천원)	담당팀
합 계		115,555
1	동작대교 보수공사외 2개소 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역	60,544	강남일반교량팀
2	영동대교 보수공사외 1개소 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역	55,011	강구조교량팀

Ⅳ		향 후 계 획

□ ‘19. 7.       : 기술용역 타당성심사 요청(용역별)

□ ‘20. 1. ~ 2. : 용역 발주 및 계약

□ ‘20. 3. ~ 6. : 실시설계 과업기간과 연계하여 용역 시행

붙 임 :　건설사업관리(설계감리)용역 내역서 1부. 끝.