투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속) 총괄1회 및 1차1회 설계변경시행 및 변경계약의뢰

우리 본부에서 추진중인 『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차1회 및 1차1회)을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)

- 공사기간 : (총차) ‘18.12.26. ~ ’19.12.25.

(1차) ‘18.12.26. ~ ’19.09.30.

- 공 사 비 : (총차) 1,831,862천원

(1차)  1,443,940천원

- 시 공 사 : 주계약자 이화종합건설㈜ / 부계약자 ㈜신영토건

나. 변경사항

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
계약금액	총 차	1,831,862,000	2,303,257,000	증) 471,395,000
	1 차	1,443,940,000	1,449,841,000	증) 5,901,000
공사기간	총 차	‘18.12.26.~’19.12.25.	변경없음
	1 차	‘18.12.26.~’19.09.30.	‘18.12.26.~’19.10.30.	(증) 30일

다. 변경사유

- 설계도서 및 사업구간 변경 등 실정보고에 따른 물량 증.감

- 보완설계 시행으로 공사지연

라. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1) 시공사 공문 1부.

2) 설계변경 보고서 1부.

3) 총차 변경 내역서 1부.

4) 1차 변경 내역서 1부.

5) 설계변경 심의결과보고서 1부. 끝.

							기반시설과장
주무관							정창수			기반시설과장					07/25 라철흠
협조자				주무관						나병윤					주무관							김경화					기획예산과장							문영일
시행			기반시설과-2280									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)															/
전화								/전송			02-3780-0744					/													/	대시민공개