문서번호	기반시설과-2265
결재일자	2019.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	07/25 代손창열
협조
	주무관		나병윤

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』

공사 설계변경 (전체1회, 1차1회)시행 보고

2019.  7.

한강사업본부

(시  설  부)

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』

공사 설계변경(전체1회, 1차1회) 시행 보고

『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)』와 관련 실정보고되어 승인한 물량 및 도급비 변경내용 등을 설계변경 처리하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)

❍ 공사규모 : 승강기 및 비상계단 설치(가양대교 남단, 올림픽대교 남단)

❍ 총사업비 : 2,830백만원(토목공사비 1,937백만원, 이전비 993백만원)

❍ 계약금액 및 공사기간

(단위:천원)

구 분	총 차	1 차	2 차	비 고
계약금액	1,831,862	1.588,334	243,528
계약기간	‘18.12.26 ~‘19.12.25	‘18.12.26 ~‘19.09.30	- ~‘19.12.25

❍ 시 공 사 : 주계약자 ⇨ 이화종합건설㈜ / 부계약자 ⇨ ㈜신영토건

□ 설계변경 사유

❍ 변경근거 : 가양 2019-0705(2019.07.15.)

- 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속) 설계변경 요청

❍ 관련방침

- ‘19.06.10 : 기반시설과-1661, 변경 설계도서 검토

- ‘19.06.11 : 기반시설과-1688, 사토장 변경

- ‘19.07.05 : 기반시설과-2009, 사업구간 변경

- ‘19.07.15 : 기반시설과-2134, 폐기물 운반, 지장물(가로등, 전력케이블)이설, 임시전력 공급비

❍ 전체분 공사비(도급비)증감내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	1,912,026,000	2,390,232,000	478,206,000
도급공사비	1,831,862,000	2,303,257,000	471,395,000
공급가액	1,665,329,091	2,093,870,000	428,540,909
부가가치세	166,532,909	209,387,000	42,854,091
관급자재비	80,164,000	86,975,000	6,811,000

❍ 전체분 제1회 주요 변경내용(도급비 : 증 471,395천원)

(단위:천원)

구 분	실 정 보 고			제 1 회 설 계 변 경			증·감
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
설계검토 오류 정정 보완	113,873	439,489	325,616	113,873	439,489	325,616	-
사토장 변경	2,042	1,798	-244	2,042	1,798	-244	-
사업구간 변경	-	4,809	4,809	-	4,809	4,809	-
폐기물 운반	-	26,938	26,938	-	26,938	26,938	-
지장물 이설 임시전력 공급비	585,200	562,306	-22,894	585,200	562,306	-22,894	-
제경비 증감	667,909	815,079	137,170	667,909	815,079	137,170	137,170
도급공사비	1,369,024	1,850,419	471,395	1,369,024	1,850,419	471,395	471,395
관급자재비	80,164	86,975	6,811	80,164	86,975	6,811	6,811
총사업비	1,449,188	1,937,394	478,206	1,449,188	1,937,394	478,206	478,206

※ 관급자재비 증액사유 : 콘크리트 물량 증가

❍ 1차분 1회 계약금액 변경(도급비:증305,765천원)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증· 감
직접공사비	1,231,565,473	1,237,386,036	5,820,563
제 경 비	212,374,527	212,454,964	80,437
공 급 가 액	1,443,940,000	1,449,841,000	5,901,000
부가가치세	144,394,000	144,984,100	590,100
도급공사비	1,588,334,000	1,594,825,100	6,491,100
관급자재비	80,164,000	86,975,000	6,811,000

❍ 준공기한(1차분 증30일) 변경

: (당초)‘18.12.26~ ‘19.09.30 ⇒ (변경)‘18.12.26~ ‘19.10.30

- 원설계사 보완설계 지연으로 가양대교 남단 승강기 PIT 및 비상계단 공사지연

- 상기와 같은 사유로 인하여 1차공사의 공사기간을 1개월(30일)연장하고 전체 공사기간은 변경이 없이 공사기간 조정됨.

□ 설계변경 자문위원회 검토사항 처리

❍ 검토사항 : 별도 지적 사항 없음

□ 조치의견

❍ 증액되는 도급비는 이전비을 사용 조치하고 설계변경에 따른 관급비 및 건설폐기물 물량은 변경 조치

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하여 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속)의 품질·안전 관리를 철저히하고 계획된 공정에 따라 공사 완료코자함.

붙  임 : 1) 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사(장기계속) 설계변경 요청 1부.

2) 설계변경 수량 및 공사비 증감 현황 1부.  끝.