문서번호	설비부-11445
결재일자	2019.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
최대진		여인웅	07/26 임정규
협조

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계공사』

1차공사 및 관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2018. 09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계공사』

1차공사 및 관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계공사』시행중 선행공정인 토목공사 지연에 따라 1차공사 및 관급자재 설치시기 미도래로 기한연장 조치사항에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

위    치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 내)

공사기간 : 2017. 12. 4 ~ 2020. 2. 3.(1차 ’17. 12. 4 ~ ’19. 8. 31)

규  모 : 총인처리시설 2개소 처리량 Q=450,000㎥/일

○ 적용공법 : 가압부상공법(에코젯그린플러스 공법)

○ 1처리장 Q=245,000㎥/일, 2처리장 Q=205,000㎥/일

- 1·2처리장 총인유입 및 처리설비, 농축설비, 용수공급설비, 탈취설비, 반류수이송설비 각 1식

공 사 비 : 11,715백만원(도급비 1,837백만원 / 관급비 9,878백만원)

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨/(주)임하엔지니어링/금수티아이(주)

감리용역 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

Ⅱ		관 련 근 거

기계설비공사 1차분 준공기한 및 지급자재 납품기한 연장 요청

- 탄천하감 2019-252호(2019.07.25.)

Ⅲ		검 토 내 용

기계공사 및 관급자재 계약현황

구분		계약번호 [납품요구 및 계약]	계약자	계약금액	준공기한 (납품기한)	비고
기계 공사	총차	2017110FE1A-01	㈜이수에이치앤씨	1,837,280,000	2020.02.03
	1차			900,000,000	2019.08.31
수문		121815144700	㈜신정기공	247,715,100	2019.08.31	다수공급자
PAC공급펌프		12182126100	천세산업(주)	164,010,000	2019.08.31	조달우수
폴리머공급펌프		2018090218901	㈜하나엔텍	28,077,700	2019.08.31	일반경쟁
슬러지펌프		2018080BCFE00	(유)건영산업	43,881,910	2019.08.31	일반경쟁
수중펌프		2018070417001	한국펌프공업협동조합	21,900,000	2019.08.31	수의
일축나사식펌프		2018080037601	(유)대성기계	23,675,300	2019.08.31	일반경쟁
송풍기		2018080BBC201	유환엔지니어링(주)	26,144,140	2019.08.31	일반경쟁

※ 조달수수료 별도

변경내용

구 분		계약금액		납품기한		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
공사	총차	1,837,280,000원	변경 내용 없음	2020.02.03	변경내용 없음
	1차	900,000,000원		2019.08.31	2019.12.31	증)122일
수문		247,715,100원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
PAC공급펌프		164,010,000원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
폴리머공급펌프		28,077,700원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
슬러지펌프		43,881,910원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
수중펌프		21,900,000원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
일축나사식펌프		23,675,300원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래
송풍기		26,144,140원		2019.08.31	2019.12.31	시기미도래

납품 및 공사기한 연장사유 : 선행 공정인 토목공사 지연

귀책소재 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

건설사업관리기술자 의견

○『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』시행중 선행공종인 토목공사의 지연으로 기계설비분야 1차분 준공기한 및 지급자재 납품기한 연기는 적정한 것으로 판단됨

Ⅳ		조 치 계 획

선행공정인 토목공사 지연에 따라 준공 및 납품설치 시기가 미도래하고 건설사업관리기술자 검토의견이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞게 1차 기계공사와 관급자재 납품기한을 총무부에 연기요청 의뢰하고자 함

붙임 ： 기계공사 1차 및 지급자재 납품기한 연장 요청 1부.  끝.