투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(송풍기 외4) 납품기한 연기의뢰(탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사)

1. 도시기반시설본부 설비부-11445(2019.07.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 □탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사□에 소요되는 관급자재(송풍기 외4)의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내역

품 명	계약번호	계약업체	계약금액	납품기한		비 고
				당 초	변 경
송풍기	2018080BBC201	유환엔지니어링(주)	26,144,140	2019/08/31	2019/12/31	일반경쟁(총액)
폴리머공급펌프	2018090218901	㈜하나엔텍	28,077,700	2019/08/31	2019/12/31	일반경쟁(총액)
슬러지펌프	2018080BCFE01	(유)건영산업	43,881,910	2019/08/31	2019/12/31	일반경쟁(총액)
수중펌프	2018070417001	한국펌프공업협동조합	21,900,000	2019/08/31	2019/12/31	수의(총액)
일축나사식펌프	2018080037601	(유)대성기계	23,675,300	2019/08/31	2019/12/31	일반경쟁(총액)

※ 계약금액 및 수량 변경없음

나. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 관급자재 설치 시기 미도래

다. 귀책소재 및 지체상금 부과여부 : 서울시 도시기반시설본부, 미부과

붙 임 : 1. 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	최대진		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/26 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-11460	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5)