투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사)

우리 본부에서 추진중인 □탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사□ 1차분의 공사준공기한을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(1차)

2. 계약업체 : ㈜이수에이치앤씨 외 2

3. 변경계약 내용

구분	계약금액(원)			계약기간		비 고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총차	1,837,280,000	1,837,280,000	변경없음	2017.12.04 ~ 2020.02.03	2017.12.04 ~ 2020.02.03	변경없음
1차	900,000,000	900,000,000		2017.12.04 ~ 2019.08.31	2017.12.04 ~ 2019.12.31	증)122일

4. 변경사유 : 선행공정인 토목 구조물 공사지연으로 1차수 준공기한 연장

5. 귀책기관 및 지체상금 부과여부 : 서울시(미부과)

6. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비 자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비(하수도사업특별회계)

붙  임 :  1. 공기연장 및 차수조정 검토 보고서 1부

2. 책임건설사업관리자 검토서 및 합의각서 등 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	최대진		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/26 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-11461	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5)