문서번호	시설보수과-6523
결재일자	2019.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	07/26 박문희
협조	관리단속과장		박종윤
	주무관		윤동원

“2019년도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)”

“추가 보수물량” 조치계획 검토 보고

2019. 7.

강서도로사업소

시설보수과

“2019년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)”

“추가 보수물량” 조치계획 검토 보고

금년도 예산 사업으로 추진중인「2019년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)」와 관련 추가 보수물량에 대한 조치계획 검토 보고 임

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(교량, 고가 등)

○ 공사규모

- 포장보수공 33.6a, 교면방수 1,243㎡, 신축이음보수 73m, 상판보수 214㎡,

단면보수 2171㎡, 도장보수 874㎡, 기타1식

○ 공사기간 : 2019. 3. 4 ~ 2019. 12. 20

○ 도 급 자 : (주)보광티앤씨 대표 윤채호

○ 총공사비 : 1,286,297천원

(도급비 931,897천원, 관급비 240,000천원, 이전비 114,400천원)

○ 공 정 율 : 87.9%

	< 예산현황 >
▷예 산 액 : 1,450,000천원 ▷공사발주 : 도) 1,095,600천원, 관) 240,000천원, 이) 114,400천원 ▷계약(도급액) : 931,897천원 ※ 낙찰차액 : 163,703천원 ----- (예산부서 협조 후 사용가능) ※ 계약심사 절감액 : 34,400천원 --- 사용불가(교량안전과 2018년 방침)

Ⅱ		공사추진현황

□ 작업지시 내역 및 진행사항

작업지시	작 업 기 간	작 업 내 용	금액(천원)	비고
1차	2019.3.28.~5.30	목동교외 8개시설, 충격흡수시설 설치 등	87,230	완료
2차	2019.4.9.~5.30	개봉철도고가외 1개시설, 소규모포장등	7,930	완료
3차	2019.4.17.~6.30	개화IC, 콘트리트 표면보수 등	94,420	완료
4차	2019.4.18.~6.30	여의2교, 신축이음보수 등	114,840	완료
5차	2019.5.18.~7.30	오금교접속교, 콘크리트 표면보수 등	226,240	완료
6차	2019.5.24.~6.30	목동교외 5개시설, 상판보수 등	12,300	완료
7차	2019.6.11.~8.15	시흥IC, 바닥판하면 단면보수 등	91,960	진행중
8차	2019.6.11.~8.20	시흥IC, 빗물배수관 교체 등	118,440	진행중
9차	2019.7.5.~8.30	가리봉철도고가외 11개소, 단면보수등	64,710	진행중
합계			819,190

○ 공정율 : 87.9% (도급비 대비)

○ 집행잔액 : 110백만원

※ 집행잔액 : 계약금액-지출액-절감액(계약심사)

Ⅲ		보고내용

□ 현재 도급비 대비 87.9%가 진행 된 상태로  2018년 정밀점검용역 및 현재 진행중인 용역 중간보고 결과 우선적으로 보수가 필요한 물량에 대한 추가 예산 확보가 필요한 실정 임.

○ 주요보수 공종 및 소요예산

1) 가리봉철도고가 교량난간 재설치 등 --- 소요금액 128백만원

☞ ‘17년 도로시설물 안전감사 지적사항

2) 목동교(신교) 강박스 외부 도장보수 등 --- 소요금액 95백만원

☞ ‘18년,19년도 정밀점검용역 및 강구조 안전점검 지적사항

3) 공단IC 1램프 교면포장 노후 등 --- 소요금액 172백만원

☞ ‘18년 정밀점검용역 보수·보강 지적사항

4) 기타 서울교, 고척교 등 중간보고 시 지적사항 조치-- 소요금액 45백만원

○ 총 소요금액 : 440백만원(개략공사비)

○ 대상시설 현황사진

1) 가리봉철도고가 교량난간(L=296m)		2) 목동교 강박스 부식 도장박리 등
3) 공단IC 1램프, 노후 및 망상균열 등		4-1) 서울교 콘크리트 박리 및 균열 등
		-	-
4-2) 고척교 하부 철근노출 및 교량받침 부식 등

○ 상기 보고내용과 같이 추가 보수를 위한 개략공사비는 440백만원이 필요한 실정이나,          현재 도급비 대비 집행 잔액이 110백만원으로 330백만원이 부족한 실정 임.

Ⅳ		조치의견

□ 추가 보수물량에 따른 예산 확보 방안

○ 부족예산 330백만원 중 본예산 활용 가능액(낙찰차액)163백만원을       우선 사용하고, 나머지 167백만원에 대해서는 관급비(240백만원)

범위 내에서 사용코자 함.

○ 추가 보수가 필요한 상기 물량에 대하여는 하반기 내 보수가 완료될 수
있도록 업체에 선 작업지시하고, 추후 설계변경 시 정산 처리코자 함.

Ⅴ		향후계획

□ 설계변경(1회) 검토 보고 및 시행 : 2019. 8월

□ 1차 기성 지급 : 2019. 8월

첨부 시설물별 개략공사비 현황 1부.  끝.