문서번호	기전과-3773
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
유정하		07/29 오준식
협 조
	주무관		이군재

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호)』

변경승인 요청 검토보고(인암빌)

2019. 7.

기  전  과

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호)』

변경승인 요청 검토보고(인암빌)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

□ 관련근거

○ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-18914(2019.7.25.)

- 교통안전시설 개선(변경)설치 통보(하달)[사근동길 47]

○ IAB 제19-18(2019.7.25.)

- 성동구 사근동 210-4(인암빌앞) 교통안전시설물 설치공사 준공기한 연기          및 설계변경 서류 제출 건

○ 대영전기감GE 19C-07-27(2019.7.25.)

- 성동구 사근동 210-4(인암빌앞) 교통안전시설물 설치공사 준공기한 연기          및 현장 여건 변동에 따른 기술검토의견서 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(인암빌)

○ 공사내용 : 횡단보도 신설 교통규제심의에 따라 교통안전시설물 설치

○ 공사구간 : 성동구 사근동 210-4 인암빌 앞

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2019. 7. 31.

○ 공사참여자

원 인 자	공사 참여자			비 고
	설계사	감리사	시공사
주식회사 인암빌	㈜동림TNS	대영유비텍㈜	㈜한신이티씨

□ 변경승인 요청 내용

○ 변경내용

- 한전 지중 전원공급이 가능한 위치로 신호지주(경보등) 설치 위치 변경

- 준공기한 연기 : 공사기간 변경 기 승인(기전과-2772, 2019.6.10.)

(※ 2019.5.31. → 2019.7.31.)

***********************************

□ 검토결과

○ 현장여건 및 변경요청 사유가 타당하여 변경승인 하고자 함.

붙임  1. 교통규제심의(변경) 문서 1부

2. 변경승인 요청 공문 1부

3. 감리사 기술검토 의견서 1부

4. 변경내역서 1부

5. 변경전·후 도면  끝.