투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	공사기간 연장 의뢰(노들섬 특화공간 조성 오수처리시설 설치공사)

1. 설비부-11539(2019.7.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘노들선 특화공간 조성 오수처리시설 설치공사’ 관련하여 공사       기간 연장 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 공사기간 연장

가. 연장내용

공사명	계 약 자	계약금액(원)	공사기간		비고
			당 초	변 경
노들섬 특화공간 조성 오수처리시설 설치공사	******	***********	**********************	************ ***********	□ 공기 50일 연장 □ 계약금액 변경없음

나. 연장사유: 선행 공종(건축) 공사일정에 따른 후속 공종인 설비분야 공사기간 연장

다. 연장 귀책소재: 본부

라. 지체상금 부과 여부: 미부과

따로 붙임  공기연장(합의각서 포함) 관련 문서 1부.

	설비부장
주무관	박경철		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/29 임정규
협조자
시행	설비부-11576	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)