“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	주식회사 라온구조안전기술
(경유)
제목	「아동자립통합지원센터 건립(現도티병원 리모델링)을 위한 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역」용역기간 연장 승인

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 라온구조안전기술(주)-*******01(2019. 7.26.)호와 관련하여, 귀 사에서 요청한 「아동자립통합지원센터 건립(現도티병원 리모델링)을 위한 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역」용역기간 연장에 대해 다음과 같이 승인하오니,

3. 연장된 용역기한을 엄수하여 정해진 기한 내에 정확한 내진성능평가가 이루어지도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용역기간 연장 : (기존)2019. 8. 5. → (연장)2019. 8.16.

나. 용역기간 연장 사유

- 내진성능평가 프로그램(마이다스 젠) 오류발생에 따라 진행중단(’19. 7. 4~ 7.22)

- 도티병원 본관 건물 부동침하 발생에 따른 대책 마련 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정태영		아동복지팀장	유규용		가족담당관	07/26 代김경원
협조자
시행	가족담당관-15527	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-5186	/전송	02-2133-0733	/	ty9623@seoul.go.kr	/	부분공개(5)