“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(용역기간 연장)

1. 박물관과-8125(2019.7.25.)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진하고 있는 ‘서울생활사박물관 개관특별전 전시물 제작·설치 용역’과

관련하여 아래와 같이 용역기간을 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 개 요

- 용 역 명 : 서울생활사박물관 개관특별전 전시물 제작·설치 용역

- 업 체 명 : 전시문화피움(대표 : 윤석민)

- 계약금액 : 금180,000,000원(금일억팔천만원)

나. 변경내용 : 계약기간 연장(계약금액 동일)

- 기간변경 : *******************************************************

- 연장사유 : 정식개관 전 현장점검 지적사항 우선 보완

시범운영 계획 수립에 따른 정식개관 연기

- 귀책소재 : 서울시(지체상환금 미부과)

붙임 1. 계약기간 연장 계획 방침서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	박물관과장
주무관	서효승		시민생활사박물관조성추진반장	김양균		박물관과장	07/26 최원규
협조자
시행	박물관과-8196	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 12층	/
전화	02-2133-4236	/전송	02-2133-1447	/		/	부분공개(6)