투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	난곡터널 조명개선공사(하행) 설계변경 계약의뢰

1. 서울시설공단 공사감독3처-6270(2019.7.25.)호 및 기전과-4452(2019. 7.26.)호와 관련입니다.

2. 난곡터널 조명개선공사(하행)와 관련하여, 공사과정에 발생한 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 난곡터널 조명개선공사(하행)

나. 공사기간 : 2019. 5. 3 ~ 2019 . 7 .31

다. 계 약 자 : **************

라. 설계변경사유 : 공사완료에 따른 건강보험료 등  제경비 실 정산

신규공종 발생 및 실제시공물량 정산

마. 계약금액                                                  (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	***********	***********	***********

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	임태수		남부도로사업소장	07/26 김영삼
협조자	관리단속과장	송기영
시행	기전과-4455	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	부분공개(5)