문서번호	방재시설부-11237
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
차성민		조성만	07/29 이임섭
협조

「양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설폐기물처리용역」

준공기한 연기 검토 보고

2019.07.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설폐기물처리용역」

준공기한 연기 검토 보고

「양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설폐기물처리용역」관련 준공기간 연기에 대한 검토 보고임.

※ 근거 : 양평1유건 제2019-208호(2019.07.29.)

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설폐기물처리용역

○ 용역규모 : 폐콘크리트 690톤, 건축폐자재 2톤, 혼합폐기물 52톤, 폐아스콘 54톤

○ 용역기간 : 2017. 3.09. ~ 2019. 8.04.

○ 계약금액 : 23,980,000원

○ 용 역 사 : 우성개발(주) 외 1개사

Ⅱ		보 고 내 용

○『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』저류조 상부 생태체육시설 조성에 따른 본 공사 준공(공사)기간 연장에 따라 본공사 일정에 맞춰 아래와 같이 준공기간을 연기하고자 함.

○ 공사기간 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	설례변경사유
계약금액	23,980,000	23,980,000	계약금액 변동없음
용역기간	2017.03.09. ～ 2019.08.04	2017.03.09. ～ 2019.11.15	본공사 공사기간에 맞춰 기간 연장(103일)

○ 귀책소재          : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		건설사업관리기술자 검토의견

○ 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설폐기물처리용역 준공기간 변경 요청에 대하여 본공사 준공(공사)기간 연장에 따른 요청으로 시공일정에 맞춰 2019.11.15.까지 연기하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		조 치 계 획

○ 건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되어 준공기한 연기에 대하여 승인토록 하고 총무부에 변경계약 의뢰코자 함.

붙임  1. 건설폐기물처리용역 준공기간 연장 검토보고(건설사업관리단) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.