문서번호	하천관리과-11051
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	한유석		07/29 이정화
협 조

『사당천 단면확장 기본 및 실시설계』

설계변경(용역기간 연장) 검토보고

2019.7

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

- 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 -

설계변경(용역기간 연장) 검토보고

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역 추진중 상류구간 추가 단면확장 등에 따른 설계변경(용역기간 연장) 검토결과를 보고드림

용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2018. 5.14. ~ 2019.7.31

○ 용역업체 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사(㈜동해종합기술공사)

○ 용 역 비 : 459,274천원

○ 과업내용

- 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위한 사당천 단면확장을 통한 하천 통수능 확대

○ 추진경과

- ‘18. 5 : 기본 및 실시설계 착수

- ‘18. 6 : 측량 및 지장물 조사 시행

- ‘18. 7 : 지장물 협의 시행

- ‘18. 9 : 우선 시공구간 자문 시행

- ‘18.11 : 우선 시공구간 설계완료 및 공사시행

- ‘19.3.18 : 중간보고(하천관리과-3837)

ㆍ방배경찰서 구간은 현재 청사이전으로 인해 ‘20년 상반기까지 유휴지 상태로, 청사 신축 완료 이후에는 공사가 불가능 하므로 추가설계 필요

- ‘19.6.24 : 전문가 설계자문

ㆍ협소한 공간에 공사시행 가능하도록 적절한 가시설 설치 및 작업공간 검토가 필요함

설계변경 및 용역기간 연장 사유

○ 설계구간 추가로 인한 기간 소요

○ 용역 준공을 위한 사전절차(설계안전성 검토, 설계심사, 설계VE 등) 이행 소요기간 반영

변경 내용

○ 계약기간

- 당 초 : 2018. 5.14.∼2019.7.31

- 변 경 : 2018. 5.14.∼2019.8.31

○ 계약금액

- 당 초 : 459,274천원

- 변 경 : 697,037천원

○ 설계내용

- 당 초

· 서문여고 일대 : 암거신설 □2.5m×2.5m ~ □2.5m×4.0m, L=558m

· 우선시공 구간 : 암거신설 □2.5m×4.0m ~ □3.0m×4.0m, L=183m

· 기  타 : 측량 0.75km, GPR조사 34개소, 터파기 22개소, 시추조사 6공 등

- 변 경(중간보고 결과보고, ’19.3.18, 하천관리과-3837에 따른 변경사항)

· 서문여고 일대 : 암거신설 □2.5m×2.5m ~ □2.5m×4.0m, L=558m

· 우선시공 구간 : 암거신설 □2.5m×3.5m ~ □3.0m×4.0m, L=261m

· 방배경찰서 일대 : □2.0m×3.0m L=82m, □4.0m×3.5m L=140m

＊□2.0m×3.0m L=110m(지장물 간섭으로 공사시행이 어려우므로, 기본설계만 시행하고, 추후 재건축 등과 연계시행)

· 기  타 : 측량 1.15km, GPR조사 34개소, 터파기 22개소, 시추조사 10공, 설계안전성 검토 등

향후계획

○ ‘19.7월 : 계약변경 의뢰(재무과)

○ ‘19.8월 : 설계 VE등 시행, 용역준공. 끝.

따로붙임 : 1. 내역서 1부.

2. 위치도 1부.끝.